문서번호	총무과-25342
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	09/11 신종우

2018년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

설계변경(2차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

행  정  국

(총  무  과)

2018년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

설계변경(2차) 검토 보고

2018년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행 중 계약 물량 증․감 및 신규공종을 반영한 설계변경(제1차) 사항을 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : ****************************

***********************

****************************

○ 계약내용 : 전기 및 소방설비 유지보수(403개 공종)

□ 설계변경 사유 및 주요내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건(행자부예규 제21호, ’18.1.10)

- 2018년 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경  적용단가 검토보고(총무과-18813, ’18.7.11.)

○ 설계변경 사유

- 지하5층 조명기구 설치 및 사무실 재배치, 전열시설 증설, 소방시설 설치 공사 중 신규공종(27개 공종)에 대해 계약물량 변경 및 신규공종을 추가 계약하고자 함

○ 설계변경 주요내용

- LED 조명기구(삼각벽등 35W) 작업에 등기구 13개소 설치

- 어린이집 분전반 1개소 철거 및 설치

- 전력케이블 직선접속 4개소 작업 등

- 시스템박스 2개소 설치 등

- 주요 변경내용

구 분	주요 변경내용	수 량		비 고
		변경 전	변경 후
물량감소	매입형형광등(32W×2) 철거 설치	50개	1개	221공종
물량증가	LED 등기구 (직부형 25W) 설치	20개	389개	31공종
신규비목	시스템박스 2개소 설치	0	2개	27공종

- 국민건강 및 연금보험의 사후 정산

▸ 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제21호, ‘18.1.10)

제1장 제8절에 따른「보험료 사후 정산」

○ 설계변경 금액

- 당초 : ************

- 변경 : *****

○ 계약기간 변경

당 초	2018. 2. 14 ~ 2018. 12. 31
변 경 후	변 경 없 음

□ 설계변경 적용단가 합의내용

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정(지방자치단체공사계약일반조건.Ⅶ)

▸ 물량 증․감 : 계약단가 적용

▸ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율(87.747%)을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 향후일정

○ 변경 계약  --------------  2018. 8. 11.(화)

○ 1차 기성 준공 -----------  2018. 8. 14.(금)

- 2차 기성 준공 금액 : ************

계약금액	금회(1차) 준공금액	금회(2차) 준공금액	잔여금액	비고
************	***********	************	***********

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 공사완료 보고서(23건) 1부.

3. 설계변경 합의각서 1부.  끝.