투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청(중랑물재생 슬러지 건조시설 설치사업 폐기물)

1. 우리 센터에서 시행하고 있는 『중랑물재생 슬러지 건조시설 설치사업 폐기물처리 용역』     건에 대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 중랑물재생 슬러지 건조시설 설치사업 폐기물처리 용역

- 용역기간 : 2018. 03. 15.~ 2018. 9. 30.

- 용 역 비 : 133,989,600원

나. 준공기한

- 당 초 :  2018. 03. 15.~ 2018. 9. 30.

- 당 초 : 2018. 03. 15.~ 2018. 12. 31.

다. 연기사유 : 중랑물재생센터 슬러지 건조시설 설치사업에서 발생된 폐기물 처리

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 방침서 및  합의서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이생기		시설보수과장	09/11 윤승범
협조자	주무관	이석근
시행	시설보수과-4954	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3146-2951	/전송	02)3146-2979	/		/	부분공개(6)