문서번호	공원사업과-1561
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		공원사업과장	공원부장
유충현		송경수	09/11 김인숙
협 조

“밤섬 생태관찰데크 조성”

기본 및 실시설계용역 향후 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

공원부

(공원사업과)

“밤섬 생태관찰데크 조성”

기본 및 실시설계용역 향후 추진계획

밤섬생태관찰데크조성 공유재산 관리계획 상정결과(시의회) “안건삭제”에 따른 향후 추진계획을 보고함

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포 당인리발전소 앞 한강변

○ 사업규모 : 생태관찰데크 1,700㎡, 보행연결로 ① 500㎡, ② 600㎡

인공식물섬(플로팅매트) 1,350㎡

○ 용역기간 :  ’17. 08. 02 ~ ’18. 12. 21

○ 용 역 비 : 295백만원

○ 용 역 사 : ㈜건축사사무소 매스 스터디스 대표 조민석외 1

□ 추진경위

○  ’15.10.29 : 한강자연성회복 및 관광자원화 종합추진계획(행정2부시장)

○  ’16.07.20 : 지명설계공모

○  ’16.12.07 : 공모심사 및 선정(당선자 : 조민석)

○  ’17.07.12 : 밤섬생태관찰데크 현안업무 보고(행정2부시장)

○  ’17.08.02 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수

○  ’17.01.12 ~ 04.22 : 하천점용허가신청 및 협의(한강본부→국토청)

- 국토청 방문 5회, 유관부서 협의(도로시설과, 공단, 중부발전소, 한강유역청 등)

○  ’18.03.15 : 공유재산심의 상정(결과 - 적정)

- 부유시설 안전대책 및 하천점용허가 득한 후 공유재산 관리계획(시의회) 상정

○  ’18.04.23 : 하천점용허가 협의 회신(국토청→한강본부)

- 협의결과(4.23) : 시설물의 교량과 접촉 등의 의견으로 설치곤란 회신

Ⅱ		‘18년 제3차 공유재산심의 상정결과

□ 관리계획 상정결과 : 안건삭제

○  ‘18.9.5 개최된 공유재산 관리계획 시의회(행자위)상정결과 홍수대비 안전성 확보여부 등의 사유로 안건 삭제

① 실질적 관찰체험 수요충족 여부, ② 교통편의성 및 접근성 방안

③ 홍수대비 안전성 확보여부 등

Ⅲ		추진계획(검토의견)

□ 설계용역 계획대로 추진

○ 계약된 설계용역은 현재 공정상 80%이상 시행 단계로서 일정대로 추진하겠으며,

○ 그에 따른 하천점용허가(서울지방국토관리청)협의 등 행정절차(설계VE)를 시행 완료함이 타당하다고 사료됨

○ 향후, 안건삭제 사유(안전성 등)에 대해 보완하여 차기 공유재산 관리계획 재상정 조치 계획임.

□ 공사시행 및 준공 : 연기 불가피(착공일로부터 1년)

Ⅳ		추 진 일 정

○ ’18. 9.~10.      : 하천점용허가 재협의(서울지방국토관리청)

○ ’18. 10.          : 설계 경제성(VE)의뢰 심사(계약심사과)

○ ’18. 10. ~ 12.  : 문체부 예산확보 협의(시 48억/문체부 48억)

○ ’18. 12.          : 설계용역 준공

○ ’19. 1.~          : 공유재산관리계획 상정 등 행정절차이행 및 공사시행 및 준공.  끝.