문서번호	건축부-13017
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(7 8)
방침번호

			시 민
★주무관		환경시설과장	건축부장
김준회		유현수	09/11 임인구
협조

『세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)』

건설폐기물 처리용역 시행계획

2018. 9

도시기반시설본부

(건축부)

『세운상가군 공공공간 조성공사 2단계』

건설폐기물 처리용역 시행계획

우리 본부가 추진 중인『세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)』중  발생되는 건설페기물에 대하여 아래와 같이 계획 수립하여 시행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 제1항

※ 건설폐기물 100톤 이상, 건설공사와 건설폐기물처리용역 분리 발주

건설폐기물의 처리등에 관한 업무지침 [환경부 예규 제629호 (2018.1.16.)]

※ 건설폐기물 소각․매립시 폐기물처분 부담금을 반영하여야 함.

사토 및 폐기물 운반관리 시스템 도입 방침 [도기본 토목부 -6215호(2017.1.16.)]

※ 건설폐기물 2,000톤 이상,

폐기물 운반차량의 운행경로 파악등을 위하 스마트 송장 의무 적용.

Ⅱ		용 역 개 요

용 역 명 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역

위    치 : 중구 세운상가군(삼풍~PJ~인현~진양상가)

용역명	용역개요	용역금액 (원)	용역기간	비고
세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 건설폐기물처리용역	“과업내용서”에 의함	○ 용역비 : 291,126,000원 ○ 폐기물분담금 : 2,411,000원 ○ 합 계 : 293,537,000원	착수후 20개월

용역내용 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 중 발생되는 건설폐기물의                   수집·운반 및 처리

처리물량 : 건설폐기물 8,199톤

(폐콘크리트 4,979, 폐아스콘 3,140, 혼합건설폐기물 80)

※ 건설페기물 2,000톤 이상이므로 과업내용서에 스마트 송장 의무 적용 현장임을 명기함.

Ⅲ		추 진 경 위

’17. 02. 10 : 공공공간 국제지명설계공모 관리용역 및 설계용역 추진계획      ’17. 07. 20 : 설계용역 착수

’18. 04.~07 : 공사발주를 위한 각종 심사, 심의 등 절자 추진

’18. 07. 10 : 건설사업관리용역 시행

’18. 07. 16 : 공사 시행

’18. 08. 23 : 공사 계약[자운이앤씨(주) 외1개사]

’18. 09.  5 : 건설사업관리용역 낙찰

Ⅳ		건설폐기물 처리용역 발주계획

입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한) / 긴급 입찰 / 장기계속

입찰참가자격

○ 지역제한 : 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약 체결일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 보유면허 : 폐기물 관리법 제25조, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제21조 및 건설페기물의 처리 등에 관한 업무처리지침 (환경부 예규 제629호, 2018.01.16.)에 따른 건설폐기물 수집․운반업과 건설폐기물 중간처리업허가를 모두 득한 업체

○ 공동도급 : 자격 보완을 위하여 건설폐기물수집․운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시, 경기도, 인천지역의 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표자는 서울특별시에 소재한 업체이어야 함

예산과목 : (도시개발특별회계) 도심 역사문화자원 관리, 세운상가군             재생사업, 시설비(205-401-01)

Ⅴ		향 후 계 획

○ ’18. 9.11   : 계약심사 의뢰

○ ’18. 9     : 건설폐기물 처리용역 시행 및 계약

○ ’20. 5     : 용역준공(예정)

붙임  1) 설  계  서 1부

2) 과업내용서 1부

3) 용역설명서 1부.  끝.