투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(제2회) 변경 계약 요청(2018년 하천시설 유지관리 및 개선공사)

우리과에서 시행중인 「2018년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)」를 아래와 같이 설계변경하였기에 변경 계약 요청합니다.

1. 공 사 명 : 2018년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)

2. 공사규모

- 아스팔트 포장 25a, 경계석 설치 879m, 저수호안 정비 1,410㎡

3. 공사기간 : 2018. 3. 12. ~ 2018. 12. 31

4. 시 공 사 : 천원샘씨앤알(주) 대표 김석중

5. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증감 및 신규 공종 추가

6. 변경금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,781,313,670	1,781,313,670	0
도 급 비	970,313,670	1,181,313,670	증)211,000,000
관 급 비	711,000,000	511,000,000	감)200,000,000
이 설 비	100,000,000	89,000,000	감)11,000,000

7. 예산과목

가. 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 한강공원 하천시설 유지관리 및 개선, 시설비(1,397,340,000원)

나. 치수 및 하천관리, 치수사업, 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비(147,000,000원)

다. 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 뚝섬전망문화복합시설 운영 및 관리, 공공운영비(8,515,430원)

라. 한강공원주차장운영, 시설비, 주차장시설물유지관리(19,590,000원)

마. 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 국가하천유지보수, 시설비(200,000,000원)

바. 치수 및 하천관리, 치수사업, 응급복구(재난관리기금 재난계정), 시설비(8,868,240원)

붙임 1. 설계변경 시행보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	석기철		시설관리과장	09/11 한흥태
협조자
시행	시설관리과-2363	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	부분공개(5)