			중부수도사업소
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	공사 변경계약 체결 보고(통보)[2018년 가압장ㆍ배수지 전기시설물 유지보수공사]

1. 시설관리과-25759(2018.09.10.)호와 관련입니다.

2.『2018년 가압장ㆍ배수지 전기시설물 유지보수공사』건에 대하여 아래와 같이 변경

계약을 체결하고 보고(통보)합니다.

가. 계약건명 : 2018년 가압장ㆍ배수지 전기시설물 유지보수공사

나. 계약업체 : *****************************

***************************

다. 계약금액

- 당초 : 총 부기금액 금71,339,000원, 1차수 금액 금59,977,500원

- 변경 : 총 부기금액 금78,469,000원, 1차수 금액 금78,469,000원

- 증감 : 총 부기금액 금7,130,000원 증가

라. 계약기간 : 변경 없음(2018.3.28. ~ 2019.3.31.)

마. 변경사유 : 내용변경(공사 물량 증감 및 보험료 정산)

바. 보증서 관련사항

- 계약보증서 : 금1,069,500원 추가 발행(총 보증금액: ￦11,770,350)

- 선금보증서 : 해당 없음

<담당자 : ***>

붙임 : 변경계약서 및 합의서 등 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김유리나		행정관리팀장	은정호		행정지원과장	장성만		중부수도사업소장	09/11 황일람
협조자
시행	행정지원과-25886	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 2층 행정지원과	/
전화	02-3146-2043	/전송	02-3146-2244	/	koko91@seoul.go.kr	/	부분공개(7)