문서번호	방재시설부-11982
결재일자	2018.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		代김달용	09/12 이임섭
협조

『서울기록원 건립공사』

조경분야 실정보고 사항 검토보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『서울기록원 건립공사』

조경분야 실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『서울기록원 건립공사』조경분야 실정사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

- 근거: 서울기록원 제2018-257호(2018.09.03.)서울기록원 및 제2018-258호(2018.09.03.)호

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 서울기록원 건립공사

▢ 위    치 : 은평구 통일로684

▢ 규    모 : 지상5층, 지하2층, 연면적 15,004㎡

❍ 조경개요

- 식  재 : 교목(소나무 등 22종 207주), 관목(남천 등 16종 4,840주)

- 시설물 : 수생비오톱 등 33종

▢ 공사기간 : 2016.04.20. ～ 2018.11.30.

▢ 공 사 비 : 150억원(조경 720백만원)

▢ 시 공 사 : 신화종합건설㈜/정우조경㈜

▢ 감 리 사 : 선진엔지니어링

Ⅱ		검 토 사 항

▢ 주관부서(서울기록원) 및 주민요구사항

❍ 서울기록원 운영지원과-4251(2018.7.6.)호 ‘서울기록원 건립공사 추가 변경사항 요청’

- 서울혁신파크 부지 내 현장사무실, 자재야적장 녹지조성으로 복구

❍ 북한산 푸르지오 아파트 입주민 요구사항

- 서울기록원과 아파트 경계부에 프라이버시 보호를 위한 수목식재 반영요청

Ⅲ		검토결과

▢ 주관부서(서울기록원) 및 주민요구사항 반영

❍ 서울혁신파크 내 현장사무실, 자재야적장 부지 수목식재

- 교목: 대왕참나무 등 3종 70주                  〔증 32,692천원〕

- 관목: 조팝나무 등 3종 1,800주

❍ 서울기록원과 아파트 경계부 수목식재 반영

- 교목: 산사나무 등 3종 64주                    〔증 41,701천원〕

- 관목: 꽃댕강나무 등 2종 1,838주

▢ 공사비 확보방안

❍ 조경공사 도급비 증액(개략공사비 74,393천원)에 대하여는 추후 본 공사 「서울기록원 건립공사」 총공사비 설계변경시 반영

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 검토사항에 대하여 승인처리하며 추후 설계 변경에 반영코자 함.

붙 임 : 감리 보고서 및 변경 도서 1부.  끝.