투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사)

1.시설과-2260(2018.9.12)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사

나. 공사기간 : 2018. 8. 6. ~ 10. 4.

다. 도급금액 : 185,437,130원

라. 도 급 자 : *************

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2018. 8. 6. ~ 10. 4.

- 변 경 : 2018. 8. 6. ~ 10. 19. (15일 연장)

바. 연기사유 : 폭염으로 인한 준공기한 연기

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 :  준공기한연기 검토 보고 1부. 끝.

	시설과장
주무관	황은애		공원조성팀장	송복식		시설과장	09/12 진병규
협조자
시행	시설과-2262	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3780-0838	/전송	02-3780-0745	/		/	대시민공개