문서번호	시설과-2260
결재일자	2018.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
황은애	송복식	진병규	09/12 안수연
협 조

「보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사」

준공기한 연기 검토 보고

2018. 9.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

「보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사」

준공기한연기검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사」와 관련하여 준공연기 사항이 발생하여 아래와 같이 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 동문부근 쉼터 및 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2018. 8. 6 ~ 10. 4

○ 총공사비 : 금241,245,880원(금이억사천일백이십사만오천팔백팔십원)

(도급액 : 금185,437,130원/ 관급자재 : 금55,808,750원)

○ 도 급 자 : 반석에코텍㈜ 대표 김기신

○ 공사내용 : 목재계단 정비 및 쉼터 조성 등

□ 검토내용

○ 연기사유

- 8월 최고기온이 35도 내외를 기록하는 등 폭염으로 인하여 현장 근로자 안전을 고려한 작업 일정 연기 등으로 공사 기간 연장 필요

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2018.08.06. ~ 2018.10.04

- 변경 : 2018.08.06. ~ 2018.10.19

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

○ 계약부서에 준공기한 변경 계약 요청

○ 본 공사 일정에 맞춰 관급자재 납품기한 변경 요청