문서번호	시설관리과-26146
결재일자	2018.9.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		09/12 황일람
협 조
	주무관		김유리나

“ 2018년 가압장.배수지 ”

전기시설물 유지보수 2차 공사 추진계획

2018. 9

중 부 수 도 사 업 소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“ 2018년 가압장∙배수지 ”

전기시설물 유지보수 2차 공사 추진계획

2018년 가압장∙배수지 등의 전기시설물 보수공사를 진행함에 따라 계약   금액이 초과되어 사업이 종료되기에, 고장발생에 따른 전기설비를 긴급 보   수하고 안정적인 설비운영을 위해 2차 공사 계약을 추진하고자 함.

Ⅰ		전기시설물 유지보수 현황

2018년 전기시설물 유지보수 공사 현황

○ 계약금액 : 71,339,000원

○ 준공금액 : 78,469,000원

○ 계약업체 : 동명이앤씨  대표  서옥이

○ 계약기간 : 2018.3.28. ~ 2019.3.31

○ 기간 공사내용

- 1차 작업지시

▸ 남산1, 2차 증압장 : 노후 감시제어반 교체에 따른 펌프실간 배관,                         케이블 교체.

▸ 보광(배)가압장 : CCTV 교체, 통신케이블 및 배관 교체.

전기실 냉방기 설치 신규전원 배관 및 케이블 포설.

▸ 구역유량계(CB-04) : 통신선로 단선사고 및 한전인입 배관,케이블                         포설.

▸ 남산대배수지 : 호이스트 크레인 MG(마그네트) 교체.

▸ 월곡소배수지 : 노후 적산전력계함 교체.

▸ 인수가압장 : 저압수전 변경 인입 동력간선 및 가압장 내부 배관,

케이블 교체.

- 2차 작업지시

▸ 인수,혜명,경내가압장 : CCTV 교체에 따른 통신케이블, 배관 포설.      ▸ 인수배수지 : CCTV 이설에 따른 지지철주 및 콘크리트 기초 이설.

○ 작업완료 금액 및 잔액

( 단위 : 원 )

구 분	계약금액	작업완료(준공)금액		잔 액	비 고
		금 액	비 율
공사비	71,339,000	78,469,000	109.9%	0	당초 계약금액을 초과하여 조기준공

○ 계약금액 조기 소진사유 및 재 발주 내용

- 1, 2차 작업지시에 따른 가압장,증압장 감시제어반 개량작업시 노후 케이블 및 배관 교체 등 기타 전기공사 작업을 수행하였으며,

- 기존 가압장, 증압장, 배수지의 노후 전기시설물을 자체 점검결과 노후된 설비에 대한 고장 발생시 사고발생을 최소화하기 위한 공사물량과 신규 설치 CCTV 및 냉방기의 전원, 제어를 위한 케이블, 배관 포설 등의 작업지시 물량을 시공완료에 따라 공사비가 상승하여, 당초 계약금액보다 초과 준공됨에 따라, 해당 업체와 사업수행이 어려워 재 발주가 필요하고,

- 조기 준공으로 혹여 긴급복구가 필요할 사항이 발생할 여지가 있으므로 추가적인 전기시설물 유지보수 2차 공사(장기계속연간단가)를 조속히 발주할 필요가 있음.

Ⅱ		관련 현황

추진근거

○ 가압장·배수지 운영관리 개선방안 [본부장 방침-3164(2012.7.27.)]

○ 2018년 전기시설물 유지보수 공사 설계변경 정산 보고

[시설관리과-24711(2018.8.30.)]

주요시설물 현황

구분	합계	중구	용산구	종로구	성북구
계	64	5	12	21	26
가압장	18	1	3	7	7
증압장	24	4	4	8	8
배수지	22	-	5	6	11

Ⅲ		사업개요

사업개요

○ 시행대상 : 가압장∙배수지∙증압장 등 전기분야 시설물

○ 시행방법 : 장기계속 연간단가계약으로 공사발주 후 시설물 유지 관리

○ 시행기간 : 착공후 ~ 2019.3.31.

사업방향

○ 긴급한 전기공사 필요시 신속한 복구공사가 가능하도록 계약 추진.

○ 다음해 연간단가계약시까지 긴급한 복구공사의 공백을 없게 하기 위해 시행기간을 다음해 3월까지로 연장.(타 사업소 준공일 동일조정)

○ 상대적으로 많은 관내 전기시설물의 정비에 맞는 적정 계약금액 설정.

○ 고장 발생이 우려되는 설비를 우선 조속히 보완하여 안정적인 설비유지      관리.

사업내용

○ 가압장∙배수지∙증압장 전력시설물 보수 및 교체공사

○ 가압장∙배수지의 조명기구 정비 및 배선공사

○ 관내 보유한 CCTV 설비 고장대비 유지보수

○ 기타 긴급하게 정비가 필요한 전기 시설물에 대한 보수공사

Ⅳ		발주계획 및 향후 추진일정

발주계획

○ 계약방법 : 전자공개수의계약【제한경쟁 입찰(지역제한)】

- 제한 경쟁입찰 사유 : 긴급한 작업지시를 수행할 수 있도록 서울지역의 전기공사업체 중에 대상을 선정함.

○ 입찰참가자격 : 전기공사업 제4조에 의한 전기공사업 등록을 필하고 주사무실이 서울특별시에 소재한 업체.

○ 소요예산 : 79,860천원	(2018년 예산 : 43,923천원, 2019년 예산 35,937천원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

향후 추진일정

○ 2019.09.12 : 발주 방침 보고.

○ 2018.10.01 : 공사계약 및 착공

○ 2018.10.01 ~ 2019.3.31 : 공사시행

Ⅴ		행정사항

공사 발주 자체방침에 따른 행정지원과 공사 계약의뢰 : 기전팀.

별첨 : 1. 가압장(증압장) 및 배수지 시설현황 1부.

2. 가압장∙배수지 CCTV 설비현황 1부.  끝.

3. 설계내역서 1부.  끝.