문서번호	기반시설과-2595
결재일자	2018.9.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
박지수	라철흠	09/12 전영주

『2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(시설부)

『2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

「2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)」관련 서울시설공단 실정보고에 대한 검토 및 처리계획을 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)

□ 공사기간 : 2018. 4. 9. ~ 2018. 9. 30.

□ 도 급 자 : ㈜에이원에스씨앤알 대표 강희남

□ 도 급 비 : 608,746천원

2		보고내용

□ 관련근거

○ 공사감독 1처-6035호(2018.09.03.)

○ 공사감독 1처-6236호(2018.09.07.)

□ 실정보고 내용

1. 수조 바닥타일 추가 정비물량 정산 반영

○ 현장 합동점검 결과 설계시 미반영된 타일들뜸 추가 정비물량 반영 및 보수 방법에 따라 발생된 신규 공종 반영

- 관련 근거 : 기반시설과-1699호(2018.06.20.)

- 추가 정비에 소요되는 수조 타일은 ‘17년 잔여 물량(4,880장) 우선 사용

○ 수량 증가표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
콘크리트 보수		㎡	18	138	증)120
무근콘크리트 깨기	소형장비(전기식)	㎥	-	3.8	증) 3.8
타일커팅		㎡	-	613	증)613
수조바닥 타일보수	245*120*8.5㎜,압착	㎡	60	222	증)120
수조바닥 타일보수	245*120*8.5㎜,압착 (지급자재)	㎡	-	58	증) 58
수조바닥 타일보수	245*120*8.5㎜,압착 (지급자재, 제거품 제외)	㎡	-	94	증) 94
신축이음부 보수	실란트 주입(B=30㎜)	m	-	157	증)157
바닥 방수코팅	엔크로즈	㎡	-	34.5	증) 34.5

2. 폐기물 처리 물량 증가 수량 반영

○ 설계시 누락된 페인트 벗김 잔재물량 및 타일보수 등 보수 물량 증가에 따른 혼합폐기물량 반영

○ 수량 증가표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
폐기물 소운반		톤	-	42.2	증)42.2
폐기물 운반	콘크리트	㎥	1.67	35.5	증)35.5
폐기물 처리	콘크리트	톤	3.84	81.7	증)81.7
혼합폐기물 운반	폐타일, 도장벗김 잔재물	톤	-	5.7	증) 5.7
혼합폐기물 처리	폐타일, 도장벗김 잔재물	톤	-	5.7	증) 5.7

3. 기타 공종에 대한 물량조정

○ 현장 조사결과 상태가 양호한 뚝섬 수영장 트렌치 설치 공종 제외

○ 공사장 안전사고 예방을 위해 설치한 가림막 휀스 물량 추가

○ 수량 증·감표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
수조내 트렌치 설치	2000*25*25*15㎜	m	200	-	감) 200
가림막 휀스 설치 및 해체	1,200*2,000㎜, 3개월 미만	개	-	40	증) 40

4. 도장공종 물량 조정 및 신규공종 반영

○ 난지 물놀이장 수조 바닥 시공방법 변경 사항 반영

○ 여의도 수영장 도막형 바닥재 재설치 구간 도막제거 공종 반영

○ 뚝섬, 여의도, 난지 수영장 오일스텐 도장 공종 제외

○ 잠실 수영장 유아풀 수조테두리 탑코팅 물량 추가

○ 수량 증·감표

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·감
바탕처리		㎡	11,503.9	8,502.9	감)3,001
탑코팅	일반	㎥	9,819	6,325	감) 3,493
탑코팅	논슬립	㎡	1,686	2,178	증) 493
오일스텐칠	2회	㎡	1,467	-	감) 1,467
고압물청소	1회(최종)	㎡	11,503.9	8,502.9	감) 3,001
콘크리트 표면갈기	그라인딩, 2회	㎡	-	4,289	감) 4,289

5. 난지물놀이장 목재데크 설치 시공방법 변경

○ 현장과 설계도면과 불일치 및 한강수위 상승시 데크 하부 준설토 침전을 예방을 위한 시공방법 변경 사항 반영

○ 설계시 누락된 인공폭포 데크구간 추가 시공

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경
단면도
장점	· 데크의 구조적 변경 적음	· 침수시 유지관리 용이 · 시공비 저렴
단점	· 시공비 증가 · 콘크리크 깨기 작업시 급수관 보호공 파손 우려 · 데크 높이 상승으로 안전사고 발생 우려 · 침수시 데크하부 준설토 침전	· 공사기간 연장 · 바닥 콘크리트 타설 및 데크틀 작업시 시공성 저하

□ 개략 공사비 증·감표                                  (단위:원)

구 분	당초	변경	증·감	비 고
순공사비	360,647,898	375,902,712	증)15,254,814
제경비	106,065,784	113,698,140	증) 7,632,356
폐기물처리비	2,916,100	5,629,900	증) 2,713,800
도급비	622,270,000	651,420,000	증)29,150,000
관급비	115,815,600	125,604,000	증) 9,788,400
총공사비	738,085,600	777,024,000	증)38,938,400

3		조치계획

○ 효율적으로 사업예산 집행을 위해 공사의 시급성을 감안하여 적정하게 공정 및 물량을 조정하였다고 판단되는 바,

○ 시설관리공단의 보고 내용과 같이 공사방법 변경 및 물량조정 사항 등에 대하여 승인하고 추후 설계변경시 정산 반영하고자 함

붙임 : 1. 실정보고서(공사감독 1처-6035호) 1부.

2. 실정보고서(공사감독 1처-6236호) 1부.  끝.