투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사)

우리 본부에서 추진중인 『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

2. 공사기간 : `17.12.11.~`18.09.30.

3. 공사금액 : 777,552,590원

4. 계 약 자 : ㈜삼영기업 대표 금동흠

5. 설계변경 내용

가. 공사기간 : 변경없음

나. 금액변경

(금액단위 : 원)

구분	계약금액	변경금액	증․감	비 고
전기공사	777,552,590	930,820,000	증)153,267,410

※ 「계약금액조정검증」확인 결과 산재보험료 등 간접비 비율 오류확인 후 수정된 930,820천원으로 설계변경(별첨 참조)

6. 설계변경 사유 : 사업주관부서 요구사항 및 현장여건 반영으로 인한 내역변경

7. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 동작대로 중앙버스전용차로 설치, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 합의서 및 관련문서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김진수		건축설비과장	김은덕		설비부장	09/12 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-12760	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)