투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(2회) 계약 요청(한강공원 이용안내표지판 정비공사)

한강공원 이용 안내표지판 정비공사(연간단가)에 대해 아래와 같이 설계변경(2회)하여 계약 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 한강공원 이용 안내표지판 정비공사

2. 공사내용 : 안내표지판 신설 110개소 및 내부안내표지판 정비

3. 공사기간 : 2018. 3. 5. ~ 2018. 12. 20

4. 변경사유 : 민원요청 사항 반영 등 안내표지판 정비에 따른 신규공종 발생 및 물량 증ㆍ감에 따른 수량 변경

5. 변경내용

가. 물량변경

공 종	단위	수 량		비 고
		당초	변경
외부보행 안내표지판 교체	개	7	8	증 1
대중교통연계 안내표지판 설치	개	66	87	증 21
내부시설안내 표지판 정비	개	55	34	감 21
내부 방향 안내 표지판 교체	개	16	29	증 13

나. 금액변경 : 변동 없음

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	205,367,300	205,367,300	-
도 금 액	187,165,300	187,165,300	-
관급자재	18,202,000	18,202,000	-

6. 시 공 사 : 동신공영(주)

붙    임  1. 설계변경 검토 보고서.

2. 설계변경 내역서.  끝.

	시설관리과장
주무관	강성수		시설관리과장	09/12 한흥태
협조자
시행	시설관리과-2375	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0692	/전송		/		/	대시민공개