투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(남산 북축순환로 노후 탄성 포장 정비공사)

1. 시설과-4246(2018.9.13.)호와 관련입니다.

2.「남산 북축순환로 노후 탄성포장 정비공사」시행과 관련하여 다음과 같이 설계변경 시행     코자 합니다.

가. 공 사 명: 남산 북축순환로 노후 탄성포장 정비공사

나. 공사기간: 2017. 12. 15 ~ 2018. 9. 15

다. 변경내용: 따로붙임

라. 변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총공사비		691,42,860	740,446,160	증) 49,003,300
도급비	공급가액	309,083,637	414,890,000	증) 105,806,363
	부가가치세	30,908,363	41,489,000	증) 10,580,637
	계	339,993,000	456,379,000	증) 116,387,000
관급자재비		286,450,860	284,067,160	감) 2,383,700
이 전 비		65,000,000	-	감) 65,000,000

붙임: 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝

주무관	김철수		시설팀장	기효상		시설과장	09/13 김재균
협조자
시행	시설과-4255	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	부분공개(5)