문서번호	기전과-5135
결재일자	2018.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
박신범	代김기중	09/13 송만규

『2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사』

설계변경 검토보고(1회)

2018. 9.

동부도로사업소

(기전과)

『2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사』

설계변경 검토보고(1회)

우리 사업소에서 시행중인 「2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)」와 관련하여 감리단으로부터 제출된 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

▢ 관련근거

◦ 기전과-3786호(2018. 7. 11.) : 추가 재배정예산 및 낙찰차액 사용 계획 보고

◦ 감리사(대영GE18B-08-24호, 2018. 08. 29.) : 설계변경서 제출

▢ 공사개요

◦ 공 사 명 : 2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

◦ 위    치 : 송파구, 강동구, 강남구, 서초구(일부)

◦ 공사규모 : 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량 규제사항 처리 1식

◦ 공사기간 : 2018. 03. 07 ~ 2018. 12. 28.

◦ 도 급 자 : ***************

◦ 도 급 비 : *************

◦ 감 리 원 : 대영유비텍 주식회사

▢ 설계변경 내용

◦ 설계변경(내역변경) 사유

- 경찰청 교통안전시설물 횡단보도 신설 규제사항 처리를 위한 낙찰차액 및 추가 배정된 예산을 반영

- 연간단가 특성상 가물량으로 계약된 수량을 실투입 물량으로 조정

- 신규 공종 추가 : 제어기 설치시 무선통신모뎀(LTE통신모뎀)은 교통운영과 신호운영실에서 설치하므로 내역에서 제외하고, 통합지주 설치에 따른 가로등 암대 설치 공종 등을 추가

◦ 주요변경 내역

연번	공 종		단위	수량		증감금액	비고
				당초	변경
1	제어기완성품(표준형)-모뎀 제외	신설	대	0	2	증) 2,437천원	신규
2	시각장애인용 음향신호기-본체(사급)	신설	대	1	24	증) 17,926천원
2	200A/디자인지주(외날개/통합)	신설	본	1	10	증) 18,156천원
3	200A 지주기초 및 양카	신설	조	1	20	증) 20,369천원
4	신호케이블 가공 4선 F-CVV,1.5SQ/5C	신설	m	1	585	증) 37,558천원
5	전선관 배관 PE φ100mm	신설	m	1	282	증) 14,930천원

◦ 공사비 변경 내용

****		****	****	***
* * *	*******	***********	***********	**************
	*****	**********	***********	***************
	*	************	************	***************

◦ 감리원 검토의견

- 현장여건에 따라 물량변경과 제어기 설치시 통신모뎀 미설치로 통신모뎀 설치를 삭제하고, 통합지주 설치에 따른 가로등 암대설치 등 신규 공종 추가와 하반기 예산이 추가 재배정되어 설계변경 시행

▢ 보고자 의견

◦ 본 공사의 감리원이 설계변경 요청한 사항을 검토한 결과 설계변경 요청이 적정한 것으로 판단되어 설계변경을 시행 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 추가 재배정예산 및 낙찰차액 사용계획 보고 1부.

2. 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 설계변경서 제출 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 교차로별 주요물량 변경내역 1부.  끝.