＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1정수장 응집, 침전지 보수공사)경창산업개발

우리 정수센터에서 시행중인『1정수장 응집, 침전지 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공  사  명 : 1정수장 응집, 침전지 보수공사

나. 공사  기간 : 2018.3.28.~9.23.

다. 도  급  액 : 692,778,420원

라. 계약상대자 : 경창산업개발(주) 대표 황재철

마. 변경  사유 : 공종별 계약물량 증감 및 보험료 정산

바. 예산  과목 : 정수비, 수선유지교체비(정수장시설유지보수)

사. 변경  사항

구 분		당 초	변 경	증‧감	비고
총 공 사 비		692,778,420	659,098,000	(감)-33,680,420
도급액	공급가액	629,798,564	599,180,000	(감)-30,618,564
	부가가치세	62,979,856	59,918,000	(감)-3,061,856
	계	692,778,420	659,098,000	(감)-33,680,420

※ 2018.9.12. 감추산필 (번호 5078, 2018.3.2.)

붙 임 : 1. 설계변경 심의 결과 1부.         2. 설계변경 심의 요청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.            4. 검증확인서(제비율 검증) 1부.

5. 검토결과서(산업안전보건관리비)  6. 합의서(경창산업개발) 1부.  끝.

주무관	김영규		주무관	이은숙		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	09/13 가길현
협조자	주무관	변민용
시행	정수시설과-7723	(	2018.9.12.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사동) 암사아리수정수센터 정수시설과	/	홈페이지
전화	3146-5753	/전송	3146-5707	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	부분공개(6)