문서번호	도시철도계획부-7694
결재일자	2018.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
이경훈		최병훈	09/13 김진팔
협 조
	토목1과장			윤방식
	주무관			한상신
	주무관			노권호

「서울지하철 9호선 2-2단계 건설사업」

총사업비 조정관련 중앙정부 협의 결과보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

「서울지하철 9호선 2-2단계 건설사업」

총사업비 조정관련 중앙정부 협의 결과보고

9호선 2-2단계(3단계) 건설사업과 관련하여 간접비, 차량비, 공항직결 공사비 등에 대해 총사업비를 조정하고자 국토교통부 및 기획재정부를 방문하여 협의한 결과를 보고드림.

1		사업현황

❍	위치	:	송파구 잠실종합운동장(2호선) ~ 강동구 둔촌동(보훈병원)
❍	규모	:	9.2㎞, 정거장 8개소
❍	총사업비	:	1,401,460백만원
❍	사업기간	:	2009 ~ 2019

❍ 계 약 현 황

구 분	918공구	919공구	920공구	921공구	922공구	923공구
설 계 사	㈜에스오씨 엔지니어링	서영엔지니어링 동일기술공사	㈜건화 대한콘설탄트	㈜건화, ㈜남진 설비, ㈜이가건축	㈜유신 ㈜동부엔지니어링	㈜삼보,㈜화신,㈜SOC, ㈜이가
건설사업관리단	㈜서영ENG	㈜수성ENG	벽산ENG㈜	㈜유신	㈜선진ENG	㈜동명ENG
시공사	SK건설㈜	삼성물산㈜	롯데건설㈜	㈜포스코건설	㈜대우건설	대림산업㈜

2		추진경위

❍	`05.04.~10.	:	예비타당성 조사(기획예산처)
❍	`07.10.15.	:	9호선 기본계획 변경 (건교부고시 제2007-428호) - 2단계 구간 추가(논현동~방이동, 12.5㎞(총38㎞))
❍	`09.07.24.	:	9호선 1단계 구간 개통
❍	`09.07.	:	9호선 연장 타당성 조사
❍	`09.07.~ `10.03.	:	9호선 2-2단계 총사업비 조정 (1~2차)
❍	`10.04.08.	:	9호선 기본계획 변경 (국토부고시 제2010-187호) - 2단계 구간 추가(방이동~둔촌동, 1.5㎞(총39.5㎞))
❍	`11.03.~ `15.07.	:	9호선 2-2단계 총사업비 조정 (3~7차)
❍	`16.11.03.	:	9호선 기본계획 변경 (국토부고시 제2016-713호) - 2단계 사업기간 3년 연장 (2001~2015→2001~2018)
❍	`17.03.~ `18.05.	:	9호선 2-2단계 총사업비 조정 (8~11차)

3		조정요청 내역

구 분		증가액 (백만원)	조 정 사 유	비 고
계		301,031
공사비	ㅇ 토 목	53,005	- 공기연장에 따른 직접비 - 시설물 유지관리기관 요청사항 등
	ㅇ 궤도, 전기, 신호	13,293	- 차량기지 유치선 증설
	ㅇ 건축, 기계, 통신	-
	ㅇ 폐기물	-
	ㅇ 간접비	66,276	- 3년 공기연장에 따른 간접비
보 상 비		-
감 리 비		4,474	- 사업기간연장 및 유치선 감리비
시설부대비		225	- 공사비 변동 (0.17%)
차 량 비		136,640	- 미지원된 80량 차량비
직결사업비		27,118	- 공항직결을 위한 추가 공사비

※ 1,401,460백만원 → 1,702,491백만원 (증 21.5%)

4		협의내용

❍ 협의개요

- 1차 협의

․일  시 : 2018.09.06. 14시 ~

․장  소 : 국토부 회의실

․참석자 : 국토부) 재정담당관실 정재영 사무관, 이병길 주무관

광역도시철도과 윤영식 사무관, 최규열 주무관

도기본) 이경훈. 노권호, 한상신 주무관

- 2차 협의

․일  시 : 2018.09.11. 15시 ~

․장  소 : 기재부 및 국토부 회의실

․참석자 : 기재부) 총사업비관리과 최상구 사무관, 임현민 주무관

국토부) 재정담당관실 이병길 주무관

광역도시철도과 윤영식 사무관, 최규열 주무관

도기본) 최병훈과장, 이경훈. 노권호, 한상신 주무관

❍ 총사업비 조정관련 중앙정부 의견

****	*******	***
*****************	******************************************************** ********************************************************************	** **
***************	******************************************************** *************	**
****************	********************************* **************************************	**

****	*******	***
****** *********	************************************************ ********************************************	** **
***************	**************************************	** **
*******	*****************************************	** **
*******	*************	**
*******	*****************************************	**
*****	******************************* **************************	**
***** *****	**********************************************	** **

5		향 후 계 획

❍ 국토교통부에서 추가로 보완요청한 증빙자료 및 관련규정 등에 대해 사업부서와 협의하여 조속히 자료 제출 – 9월 말

❍ 본부 요구사항이 최대한 반영될 수 있도록 중앙정부와 지속적으로 협의 추진

붙임 : 총사업비 조정요구 보완자료 (국토부 요구사항) 1부. 끝.