문서번호	공원기획과-2980
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원기획과장	공원부장
김민경	김호규	전결 09/14 김인숙

「2018 이촌축구교육장 시설개선 공사」준공보고

공   원   부

(공원기획과)

「2018 이촌축구교육장 시설개선 공사」준공보고

이촌축구교육장의 노후한 인조잔디와 심한 훼손으로 복구가 어려운 천연잔디를 계절에 관계없이 사용 가능한 인조잔디로 교체한 공사가 완료되어 다음과 같이 보고 드림

□ 공사개요

❍ 기    간: 2017. 8. 9. ~ 2018. 9. 5.

❍ 위    치: 용산구 이촌로72길 62 (이촌축구교육장)

❍ 공사내용

- 천연·인조잔디 철거 후 인조잔디로 전면 교체

- 컨테이너 3동 교체 설치

❍ 도급업체: ***************

※ 폐기물처리 업체: ****************

❍ 총공사비: ************

□ 변경(정산)사유

❍ 2·4교육장(구. 천연잔디 구장) 바닥 콘크리트 조정

- 당초 인조잔디 구장 조성을 위한 바닥 콘크리트(T=150㎜→ T=135㎜)를 조정하여 시공

- 사용하지 않은 레미콘(관급자재, 12㎥) 및 관련 공종에 대하여 감 정산

❍ 컨테이너하우스(관급자재) 3동 미설치

- 컨테이너 납품업체가 교체를 위한 크레인, 지게차 운행시 도로시설물(보도블럭‧빗물받이‧경계석 등) 손상이 우려되어 전체 교체보다는 부분 정비(전기 및 바닥보수 등)하여 사용하기로 함

□ 변경(정산) 세부내용

❍ 도급공사

구 분	세부내역	증감(원)
변 경	터파기 120㎥ ➝ 108㎥	*******
	사토운반 120㎥ ➝ 108㎥	********
	레미콘타설 120㎥ ➝ 108㎥	********

❍ 관급자재

품 명	세부내역	증감(원)
레 미 콘	120㎥ ➝ 108㎥	********
컨테이너	3동 ➝ 0동	***********

□ 정산내역

구 분		금 액(원)		증감(원)	비고
		당 초	준공(정산)
총공사비		***********	***********	***********
도급비	소 계	**********	**********	**********
	공급가액	**********	**********	********
	부 가 세	*********	*********	*******
폐기물 처리비	소 계	**********	**********	*
	공급가액	**********	**********	*
	부 가 세	*********	*********	*
관급 자재	소 계	***********	***********	***********
	인조잔디	***********	***********	*
	인조잔디패드	**********	**********	*
	레 미 콘	*********	*********	********
	컨테이너	**********	*	***********
	조달수수료	*********	*********	*******

□ 조치계획

❍ 사용하지 않은 레미콘과 공종에 대하여 감 정산하여 준공 처리

❍ 컨테이너는 구매 취소하고, 전기 등에 대한 안전점검을 실시하여 향후 부분 보수 예정

붙임  1. 변경(정산) 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 준공사진 1부.  끝.