문서번호	기전과-5176
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박신범		09/14 정판식
협 조
	주무관		성기학

2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경 계획 보고

2018. 9.

2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

설계변경 계획 보고

「2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 작업중 신공종 발생 및 물량증감 사항이 발생하여 설계변경코자 함.

□ 계약현황

○ 사 업 명 : 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 규    모 : 잠실대교 등 41개소 도로기전시설물 유지보수 1식

○ 계약기간 : 2018. 3. 14. ~ 2018. 12. 26.

○ 계 약 자 : ㈜태호산업 대표 박광석

○ 계약금액 : 금131,322,940원

□ 설계변경 개요

○ 공사추진 현황

구분	작업기간	작업내용	공정율	비고
1차	`18. 5. 2.~ 5. 28.	올림픽대교 남단 인입케이블 교체 외 11건	100%
2차	`18. 7. 6.~ 8. 13.	봉은교 격등 불가 회로 분리 외 9건	100%

○ 주요물량 변경내역

연번	공 종	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
1	안정기 교체(단독,터널,지하차도)	개	200	231	증) 31
2	글러브세척(각종)	개	3,307	4,410	증) 1,103
3	전력케이블 신설(CV 16㎟×1C 2열동시)	m	200	0	감) 200
4	전력케이블 신설(CV 16㎟×2C 2열동시)	m	200	0	감) 200
5	전력케이블 설치(CV 6㎟×1C 4열동시)	m	0	2,668	증) 2,668	신규
6	전력케이블 철거(CV 6㎟×1C 3열동시)	m	0	2,001	증) 2,001	신규

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		변경 전	변경 후	증․감	비 고
총공사비		131,322,940	131,322,940	-
도급비	공급가액	119,384,491	119,384,491	-
	부가가치세	11,938,449	11,938,449	-
	계	131,322,940	131,322,940	-

○ 설계변경 사유

- 도로기전시설물 유지보수 공사 중 현장 여건에 따른 신규 공종발생 및 물량 증감

□ 행정사항

○ 상기 설계변경 사항을 반영하여 관리단속과에 계약변경 의뢰

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증 확인서 1부.  끝.