문서번호	설비부-12861
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	09/14 권오식
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

설계변경(총차3회, 3차1회)검토보고

2018. 09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』

설계변경(총차3회, 3차1회) 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사 』임시조명 설치 실정보고 승인한 사항에 설계변경 시행하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 터널 320m

□  시 공 사 : ***************

□ 공사금액 : **********************************

□ 공 정 률 : 25%(임시조명 설치 준비중)

2		추진경위

□ 설비부-11032(`18.8.8) : 임시조명설치 승인 통보

□ 한해기 제2018-384호(`18.9.14): 건설사업관리단 설계변경 보고

3		설계변경 내용

□ 토목공사 공정진행에 따른 임시조명 설치

○ 터널 중앙기둥부 LED터널등기구 64개 임시 설치 후 본공사 시 재사용

□  변경내용

공종	변경내역	변경금액
임시조명 설비	·LED터널등기구 설치 증)64개 ·LED터널등기구 철거 증)64개 ·F-CV 3C 6mm2 증)960m	*********
직접비 계		*********
제경비(부가세 포함)		*********
도급비		**********

○ 변경내역(총차)

○ 변경내역(3차)

공종	변경내역	변경금액
보도박스 전등 설비	·HI전선관 28mm 감)100m ·HI전선관 36mm 감)100m ·풀박스(150*150*100) 감)57개	*********
임시조명 설비	·LED터널등기구 설치 증)64개 ·F-CV 3C 6mm2 증)960m	*********
보도박스 소방 설비	·PE전선관 28mm 감)130m ·풀박스(150*150*100) 감)13개	*********
직접비 계		*******
제경비(부가세 포함)		*********
도급비		*********

‣ 변경사유 : 3차공사 기간(`18.12.31) 내에 설치 불가한 공정을 제외하고                    설치 가능한 공정을 반영하여 예산의 효율적 사용

□  계약금액 변경내용

구분	계약금액		증감액
	변경 전	변경 후
총차	***************	***************	*************
3차	************	************	************

4		보고자 의견

□   기 실정보고 승인에 따른 건설사업관리단의 설계변경 검토보고 내용이 적정         하다고 판단되므로 계약부서에 설계변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1)건설사업관리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서 2부.

3)제비율 검증확인서 1부. 끝.