＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	배급수관 정비공사 시행계획 변경 승인 요청

우리사업소에서 시행중인 배급수관 정비사업 시행 중 아래와 같은 변경사항이 발생되어 당초계획을 변경하여 승인요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 양평동1가5-1 ~ 당산동2가 1 외 5개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요

- 정비연장 : D=80~300mm, L= 2,398m

- 공사기간 : 202018.04.13.~12.08.

- 계약금액 : 900백만원

- 현공정율 : 73%

나. 당초 승인 내용

- 1구간 양평동1가 5-1 ~ 당산동2가1, 480m - 공사완료

- 2구간 문래동3가 84-2 ~ 72, 4800m  - 공사완료

- 3구간 문래동3가 56-1 ~ 8-6, 250m  - 공사완료

- 4구간 영등포동4가 57 ~ 431-6, 340m

- 5구간 영등포동3가 6 ~ 10-16, 340m

- 6구간 양평동2가 39-1 ~ 19-3, 385m - 공사완료

다. 변경 승인요청 내용

- 총 6개 구간 2,398m중 민원 발생된 4,5구간을 일부를 제외한 1,755m는 완료하여  하였으며, 민원발생으로 인한 공사불가 구간 520m 발생(4,5공사구간 일부)

- 공사불가구간 : 520m

▷ 4구간 신세계백화점 앞(영등포동4가 57 ~ 431-6, 250m) , 2020년 이후 차도 공사가능

▷ 5구간 신세계백화점 월편(영등포동3가 6 ~ 10-16, 270m) , 2020년 이후 차도 공사가능

- 대체관로 선정 사유 : 관내 비내식성 관로중 1984년 부설된 회주철관이며 굴착승인 가능

▷ 양평동2가 41-33~29-23, 1976년 부설된 회주철관(굴착승인 가능)

▷ 양평동1가 19-2~115-1, 1976년 부설된 회주철관(굴착승인 가능)

▷ 문래동3가 69-2~당산동2가 4-3, 1982년 부설된 회주철관(굴착승인 가능)

라. 변경사유 : 4,5구간 내 노점상가 민원으로 인한 공사구간 일부를 금회 공사에서 제외 및 대체관로 선정

마. 대체관로

연번	위치	사업개요	재질	부설연도
1	양평동2가 41-33~29-33	D=300mm, L=110m	CIP	1976
2	양평동1가19-2~115-1	D=200mm, L=220m	CIP	1976
3	문래동3가 69-2~당산동2가4-3	D=300mm, L=230m	CIP	1982

붙임 : 계획변경 보고서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	김진태		주무관	서규석		시설관리과장	09/14 김기상
협조자
시행	시설관리과-22175	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개