문서번호	도로보수과-5060
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이석연	송광석	김유찬		09/14 송만규
협 조

설계변경·정산(제2회)계획 보고

『2018년 포장도로 불량맨홀 정비공사』

2018.  9.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경·정산(제2회)계획 보고

『2018년 포장도로 불량맨홀 정비공사』

우리사업소에서 시행중인 『2018년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』와 관련하여 신규공종 발생 및 시공물량 증․감 등에 따른 제2회 설계변경·정산 계획을 보고드림

1		공사 개요

공 사 명 : 2018년 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

공사기간 : 2018. 4. 17. ~ 2018. 12. 20.

공사개요 : 불량맨홀 정비 1,007개소

공 사 비 : *****************

도 급 자 : **************

2		설계변경 사유 및 내용

설계변경 사유

○ 신규공종 발생

- 맨홀정비 시 주변 포장면의 포트홀, 망상균열 등 정비가 필요한 주변포장면 정비공(폭 5cm~15cm)

○ 신규공종 설계반영에 따른 기 계약공종 물량조정(증·감) 시행

주요 물량변경 내용

○ 당초 1,007개소 ⇒ 변경 1,015개소(증 8개소)

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
기본포장면 정비	개소	912	787	감 125
주변포장면 정비(5㎝)	개소	53	137	증 84
주변포장면 정비(10㎝)	개소	21	57	증 36
주변포장면 정비(15㎝)	개소	21	34	증 13
계	개소	1,007	1,015	증 8

공사비 변경 내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총 공 사 비		￦882,500,000	￦882,500,000	-
도급비	공급가액	￦802,272,728	￦802,272,728	-
	부가가치세	￦80,227,272	￦80,227,272	-
	계	￦882,500,000	￦882,500,000	-

3		제2회 정산 시행

정산내용 : 제3차~제6차 작업지시분에 대해 정산처리(기성)

주요내용 : 불량맨홀 정비 356개소

○ 2017년 정기점검시 도출된 불량맨홀 정비 152개소

○ 도로순찰 및 민원 발생에 따른 불량맨홀 정비 36개소

○ 도로 정비구간 불량맨홀 정비 168개소

○ 맨홀종류별 불량맨홀 정비 현황

구분	계	하수	상수	통신	전기	가스	소화전	난방	기타
전회누계	173	31	47	25	47	-	15	8	-
금회기성	356	107	104	98	25	5	5	5	7
누계물량	529	138	151	123	72	5	20	13	7

○ 노선별 불량맨홀 정비 현황(제2회 기성분) ※누계자료 붙임 참조

- 광평로(4), 남부순환로(3), 논현로(9), 도산대로(43), 동남로(13), 밤고개로(6), 봉은사로(1), 삼성로(40), 삼전로(1), 상일로(2), 송파대로(6), 신천로(20), 양산로(1), 양재대로(44), 언주로(12), 역삼로(7), 영동대로(17), 오금로(26), 올림픽로(51), 위례성대로(1), 천호대로(2), 테헤란로(9), 학동로(32), 헌릉로(6)

정산금액

계약액	기정산액	금회 정산액	누계기성액	잔액	비고
￦882,500,000	￦153,450,000	￦299,530,000	￦452,980,000	￦429,520,000

4		조치 계획

붙임 설계변경도서 및 정산서에 의거 설계변경 및 정산시행

시방서 기준에 의거 시편 채취(50개소당 1개소, 최소 3개소) 후 품질시험소에 시험 의뢰(압축강도 측정)

붙임  1. 제2회 설계변경도서 1부.

2. 제2회 정산 설계도서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 노선별, 종류별 맨홀 정비 현황 1부.  끝.