위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 재난위험시설 등 보수보강공사사업 자치구 이행실태 점검결과 통보

1. ************************* 관련입니다.

2. 2018년 재난위험시설 등 보수보강사업 자치구 이행실태 점검결과를 아래와 같이 통보하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 동대문구 등 *************

나. 점검기간: ‘18. 7.24 ∼ ’18. 8.31

다. 점검내용: 보조금 세입·세출예산 편성, 계약방법 및 집행절차 등

라. 점검결과

사업완료: 동대문구 등***************

사업진행: 영등포 구 등 *************

마. 자치구 조치사항

□ 사업추진 부적정 사례 및 조치사항

구 분	사업명	내 용	비 고
강동	명진들꽃사랑마을 노후담장 보수·보강(49,790천원)	시설물 관리주체에서 자체 보수하여 예산불용 예상	안전취약시설 추가발굴 하여 집행토록 조치
서대문	한양아파트후면 사면배수공 설치 (1,948천원)	사업변경 승인없이 추가사업에 예산투입 (연흥약수터 노후 낙석방지책 긴급 재설치 공사)	유사사례 방지를 위해 향후에는 사업계획 변경 승인후 집행토록 경고조치
	궁동산 사방시설 도수로 정비 (3,491천원)
은평	수색로 도로옹벽 정비 (150,000천원)	공법변경으로 잔액 과다발생 (70,000천원)	안전취약시설 추가 발굴하여 집행토록 조치

□ 공통사항

사업완료후 정산보고서 제출(2018.1.5한) → 별도공문시행예정

집행잔액이 발생한 사업에 대하여는 2019년 예산에 반영 조치(반납금)

3. 아울러 2019년도 재난위험시설 등 보수보강사업이 효과적으로 추진 될 수 있도록 시설안전 사각지대 발굴 등 대상지 선정에 많은 관심을 가져주시기 바랍니다.

따로붙임 : 점검결과 보고서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강동구청장(자치안전과장),영등포구청장(도시안전과장),성동구청장(안전관리과장),종로구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),금천구청장(도시안전과장),노원구청장(자치안전과장),양천구청장(안전재난과장),강북구청장(안전치수과장),동대문구청장(안전담당관),은평구청장(자치안전과장),용산구청장(안전재난과장)
★실무사무관	김재영		시설안전팀장	代노은영		시설안전과장	09/14 고승효
협조자	수사관	윤여민
시행	시설안전과-13549	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	jfgold@seoul.go.kr	/	부분공개(6)