문서번호	토목부-16152
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		代박운용	09/14 김영수
협조

금하지하차도 가시설 변경 및 계측기 추가 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

금하지하차도 가시설 변경 및 계측기 추가 검토보고

한신아파트 앞 보도육교 하부구간은 작업공간 부족으로 Sheet-Pile 시공이 곤란하여 소음·진동을 최소화하고 시공 가능한 공법(H-PILE 토류판+SGR)으로 변경하고, 굴착고가 깊은 집수정구간은 가시설 안전성 확보를 위한 계측기 추가를 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11. 30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

건설사업관리단 검토의견

❍ 한신아파트 앞 보도육교 하부구간은 보도육교의 STEEL BOX로 인해 SHEET PILE을 시공하기에는 부적합하여 시공이 가능하고 소음·진동 민원을 최소화 할 수 있는 H-PILE+토류판+SGR로 변경 시공함이 바람직하며,

❍ 집수정구간은 가시설 단면이 확폭되고 터파기 굴착고가 깊어(H=22m) 안전이 우려되므로 계측기를 추가로 설치하여 가시설 안전성을 확보함이 타당함.

❍ 한신아파트 앞 보도육교 구간 가시설 변경(감 18백만원)

- SHEE PILE → H-PILE+토류판+SGR(차수)

당 초	변 경

❍ 집수정 구간 계측기 추가설치(증 19백만원)

- 하중계(4), 변형률계(3), 빔센서(2)

❍ 주요수량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
말뚝박기천공(φ45cm)	m	8,094	7,919	-175
Sheet Pile박기(사이런트파일러)	m	8,094	7,919	-175
Sheet Pile뽑기(사이런트파일러)	본	597	567	-30
버팀보 설치 및 철거	본	94	97	3
버팀보단부 설치 및 철거	EA	250	258	8
토사(모래)천공	m	465	794	329
현탁액형 주입비(㎥당)	㎥	30	40	10
하중계	EA	-	4	4
변형률계	EA	-	3	3
빔센서	EA	-	2	2

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
직 공 비	1,109,717	1,132,415	22,698
제 잡 비	294,683	273,085	-21,598	4대 보험금 실비정산 반영
총공사비	1,404,400	1,405,500	1,100

(단위 : 천원)

※ 기계약단가 우선적용, 신규비목 및 증가물량(H-Pile 천공·박기, 집수정구간 계측)은

강제협의율(84.64%) 적용

검토의견

❍ 한신아파트 앞 보도육교 하부구간 가시설은 Sheet Pile 시공이 곤란(공간부족)하여 시공이 가능하고 소음·진동 민원을 최소화 할 수 있는 공법(H-Pile 토류판+차수)으로 변경하고, 굴착고가 깊은 집수정부에 가시설 안전성 확보를 위해 계측기를 추가 설치코자하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.