문서번호	기전과-4328
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		09/14 임태수
협 조

『2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제3차 작업지시 계획 보고

2018. 9.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제3차 작업지시 계획 보고

『2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』관련 제3차 작업지시를 아래와 같이 시행하여 교통안전표지 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 교통안전표지 현황                             <2018년, T-gis자료>

구 분	합계	주의	규제	지시	보조	대형	기타
안전표지	12,924	958	4,572	2,762	4,004	42	586

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

○ 공사장소 : 남부도로사업소 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

○ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

○ 계 약 자 : *****************

- 계약기간 : 2018. 3. 05. ~ 2018. 12. 28.

- 계약금액 : ************

※ 감리업체 : ************

□ 그간의 추진사항

○ 2018. 3. 12 : 1차 작업지시(56건)

- 작업기간 : 2018. 3. 12. ~ 8. 31.

- 작업내용 및 결과 : 총 56건(완료 52건, 미완료 4건)

▷ 규제사항 : 38건(완료 30건, 미완료 3건)

▷ 일상유지보수 : 23건(완료 22건, 미완료 1건)

- 2018. 5. 31. : 작업완료 보고(감리)

※ 미완료 4건에 대하여는 현장작업 여건(신호, 도면 등)이 조성되면 작업실시

○ 2018. 6. 15 : 2차 작업지시(29건)

- 작업기간 : 2018. 6. 15. ~ 8. 31.

- 작업내용 및 결과 : 총 29건(완료 28건, 미완료 1건)

▷ 규제사항 : 24건(완료 23건, 미완료 1건)

▷ 일상유지보수 : 5건(완료 5건)

- 2018. 8. 31. : 작업완료 보고(감리)

※ 미완료 1건에 대하여는 현장작업 여건(신호, 도면 등)이 조성되면 작업실시

□ 금회 작업지시 사항(제3차)

○ 작업지시 차수 : 제3차 작업지시(27건) -- 총 누계 112건

○ 작업완료 기한 : 2018. 9. 17 ~ 11. 30(금).

○ 작업지시 대상 : 27건(규제 20건, 일상유지보수 7건)

<주요내용>

연번	위 치	작 업 내 용	작업근거	비고
1	영등포구 여의교 (지명표지 차로방향 도안수정)	.도안수정 -------- 2개소(수정) ⇒ 차로방향 분홍색 표시	교통운영과-13722 2018.8.17
2	서초구 잠원동 77 (횡단보도 표지)	.“횡단보도표지 노후교체-- 1조(교) ⇒ 횡단보도 전방 이전 설치	자체순찰
3	강남구 압구정동 394 (한남IC)	.좌측통행및충돌방지 --- 1조(교) (탈색 및 노후)	자체순찰
4	금천구 독산동 472-8	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	교통관리과-7739 (2018.04.02)
5	서초구 서초동 1748-11 (서초고등학교 부근)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	교통관리과-7739 (2018.04.02)
6	영등포구 신길동 2798 (신풍역)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	교통관리과-7739 (2018.04.02)
7	동작구 상도동 518-1 (상도전통시장 입구측)	.보조표지(좌회전감응) -- 1(신)	교통관리과-7739 (2018.04.02)
8	관악구 신림동 22 (관악재활용센터 앞)	.부착대교체(노후부식) ---1(교) ⇒ 표지 재사용	자체순찰
9	동작구 노량진동13-8 (노량진고가차도 노들로 입구측)	.#211(진입금지)+보조표지-- 1조(교) .기존표지철거 --- 1조(철)	교통관리과-19311 (2018.08.03)
10	동작구 노량진동153-18 (노량진119안전센터앞)	#211(진입금지)+보조표지 — 1조(신)	교통관리과-19311 (2018.08.03)

※ 세부사항 : “따로붙임” —  3차 작업지시서

□ 추진계획

○ 금회 경찰청 규제사항(20건) 및 일상유지보수(7건)에 대하여 제3차 작업지시 하여 완료토록 하며, 1,2차작업 미완료(5건) 작업사항은 작업여건이 되면 금회 작업기간 내에 작업토록 함.

□ 행정사항

○ 제3차 작업지시 : 2018. 9. 14.

○ 제3차 작업기간 : 2018. 9. 17. ~ 11. 30일까지

※ 3차 작업기간 중 경찰청 규제사항 및 긴급사항 발생시 추가 작업지시로 신속히 교통안전표지 설치 및 유지보수.

붙 임 : 1. 제3차 작업지시 사항 1부.

2. 위치도 및 관련도면(별첨) 1부.  끝.