문서번호	시설안전과-13543
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	안전점검팀장	시설안전과장
김태우	박철규	09/14 고승효
협 조

『안전점검 통합관리시스템 구축』 용역연장 검토 보고

2018. 09.

안전총괄본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

「안전점검 통합관리시스템 구축」

용역기간연장 검토 보고

구축중인 ‘안전점검 통합관리시스템’ 자료연계 시스템 중 하나인 시설물정보관리통합시스템의 고도화 진행에 따른 변경내용 적용을 위하여 용역기간을 연장하고자 함.

Ⅰ		추진경위

○ `17. 5.19. : 용역계약 및 착수

○ `18.  5.11. : 과업내용 추가에 따른 용역변경계약

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 안전점검 통합관리시스템 구축 용역

○ 계약금액 : 349,998천원

○ 사업기간 : 2017.5.19. ~ 2018.9.14.

○ 용역업체 : ㈜우대칼스 (대표자 김경민)

Ⅲ		용역연장 내용

구분	기 존	변 경	비고
기간	`17.5.19.~`18.9.14.	`17.5.19.~`18.10.14.	1개월 (증)
금액	349,998천원	변경없음
사유	○ 주로 시설물 관련자료를 연계하여 활용하는 시스템 중의 하나인 시설물정보종합관리시스템(FMS)이 고도화 용역이 진행중으로 원활한 연계를 위하여 용역기간 연장

Ⅳ		검토의견

□ 구축중인 시스템은 서울시에 소재하는 모든 시설물의 안전점검을 통합관리하려는 시스템으로서 시설물정보종합관리시스템, 세움터 등 기존 운영중인 시스템의 자료와 연계하여 점검일정, 계획수립 및 이력관리를 하고자 구축하는 시스템임.

□ 한국시설안전공단이 운영하는 FMS(시설물정보종합관리시스템)가  고도화 용역중으로 변경 사항 적용을 위하여 용역기간 연장 필요.

□ 따라서, 중앙정부 시스템의 변경사항 연계를 위해 용역기간 연장이 필요함.(귀책사유 : 외부요인에 의한 연장)

Ⅴ		행정사항

○ 용역기간을 연장하여 관련사업 추진하고자 함.

붙임 1. 계약기간 연기요청서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.