위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경 의뢰

1. 도로계획과-11840(2018. 9. 14.)호와 관련입니다.

2. 우리과 시행중인*******************************에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 용 역 명 : *****************************

○ 계 약 자 : ***********

○ 용역 계약변경 내용

가. 계약자 변경 : (당초) ㈜서우티이씨, 건축사사무소 토우

(변경) ㈜서우티이씨, ㈜건축사사무소 토우

- 변경사유 : 개인사업자 ⇒ 법인사업자

나. 준공기한 연기 : (당초) 2018. 9. 18. ⇒ (변경) 2018. 12. 17.

*********************************************

붙 임 : 1. 준공기한 연기 방침서 1부.
2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.
3. 합의각서 1부.

4. 사업자 변경서류 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	김대욱		도로시설계획팀장	윤장혁		도로계획과장	09/14 안대희
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-11842	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8084	/전송		/	deauk0207@seoul.go.kr	/	부분공개(5)