문서번호	도로계획과-11840
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도로시설계획팀장	도로계획과장	안전총괄관
김대욱	윤장혁	안대희	09/14 하종현

용역 계약변경 보고

【남대문로 일대 지하공공보도시설 설치 타당성조사 용역】

2018. 4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

용역 계약변경 보고

1. 용역개요

○ 용 역 명 : 남대문로 일대 지하공공보도시설 설치 타당성 조사 용역

○ 계 약 자 : ㈜서우티이씨, 건축사사무소 토우

○ 계약금액 : 금167,762,000원(금일억육천칠백칠십육만이천원정)

○ 계약년월일 : 2017. 4. 27.

○ 착수년월일 : 2017. 5.   8.

○ 준공예정일 : 2018. 9.  18.

2. 보고내용

○ 계약자 변경(일부)

가. 계약자

- (당 초) ㈜서우티이씨, 건축사사무소 토우

(변 경) ㈜서우티이씨, ㈜건축사사무소 토우

나. 변경 사유

*********************

*****************

○ 준공기한 연기

가. 준공기한

- (당 초) 2018. 9. 18. ⇒ (변 경) 2018. 12. 17.

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

**********************************************

2018. 09.

보 고 자 : 지방시설주사보  김 대 욱

따로붙임 : 준공기한 연기의뢰서