투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	잠실주경기장 3층 화장실 기계설비 보수공사 준공기한 연기시행

1. 시설개선과-7846(2018.9.17)호와 관련입니다.

2.『잠실주경기장 3층 화장실 기계설비 보수공사』에 대한 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠실주경기장 3층 화장실 기계설비 보수공사

나. 공사기간 : 2018.8.10 ~ 10.2

다. 공사개요 : 화장실 위생기구 철거 및 설치, 화장실 급수배관 및 오배수배관 정비

라. 공사금액 : *************-부가가치세 포함

마. 시 공 사 : ****************

바. 연기사유

- 건축분야 화장실 정비공사 기간연장에 따른 기계설비 분야 공사기간 연장

- 귀책소재 : 체육시설관리사업소

- 변경기간

당초 준공기한	변경 준공기한	비 고
2018.8.10 ~ 2018.10.2	2018.8.10 ~ 2018.11.16

첨 부 : 방침서 1부. 끝.

	시설개선과장
주무관	이준모		시설개선과장	09/17 정경수
협조자	주무관	지양수
시행	시설개선과-7850	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	3146-5373	/전송	3146-5309	/		/	부분공개(7)