문서번호	토목부-16261
결재일자	2018.9.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	09/17 김영수
협조
	주무관		남덕희

광명 휴먼시아 APT 옆 방음벽 변경 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

도시기반시설본부

(토  목  부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

광명 휴먼시아 APT 옆 방음벽 변경 검토보고

○ 광명시 휴먼시아 아파트 옆 방음시설에 대하여 지역 국회의원(이언주 의원), 시의원 및 주민들과 수차례 협의하고 최종 협의안을 반영하여 방음시설을 변경코자 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11. 30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

관련 추진경위

❍  2018.03.12 : 주민간담회(국회의원 이언주, 시의원, 휴먼시아@ 입주자대표회의)

- 주민요구 : 지하차도 BOX와 U-type 방음터널 사이를 이격시킨 부분이 굴뚝모양으로 자동차 매연·분진이 아파트로 집중 유입될 것이므로 이격부위 없이 모두 방음터널로 연속해서 시공할 것.

- 답변사항 : 금하지하차도 BOX와 U-Type부 방음터널을 붙여 설치하면 지하차도 터널부 연장 증가로 터널내 화재위험도가 높아짐

· 방재위험도 증가 방지 : 방음터널 일부 이격 설치(L=30m)

· 소음환경기준 만족 : 해당부위 방음벽(H=9m)으로 감싸고, 저소음포장 추가시행

- 이언주 국회의원 : 서울시는 주민이 만족할 수 있는 대안을 마련하여 주민협의회 개최할 것

❍  2018.03.29 : 주민협의회 개최 (국회의원 이언주, 휴먼시아@ 입주자대표회의)

- 방재안전에 이상없는 범위내에서 안양천방향으로 자동차 매연 유도방안 제시

(H=9m 직립형 방음벽 ⇒ 6m직립형 + 3m꺽기형)

현재	제시(안)

- 101동 앞 방음벽 추가 설치 예정(L=16m)

※ 주민 및 이언주 국회의원 : 101동 앞 방음벽 추가 설치는 고맙게 생각하나, 천장을 좀 더 덮을 수 있는 방안으로 재협의 바람.

○ 2018.05.10. : 2차 주민협의회(국회의원 이언주, 휴먼시아@ 입주자대표회의)

당초	변경

※ 방음벽 높이 조정(H=9m→3.5m) 및 일부 천장 설치(수서방향 폭5.4m) 합의

건설사업관리단 검토의견

❍ BOX와 U-Type 방음터널이 연속되면 폐쇄공간이 길어져(L=528.6m → 968.6m) 지하차도내 화재발생시 방재위험도가 증가되어(방재등급 상향 3등급→2등급) 지하차도BOX와 U-Type 방음터널 사이를 30m 이격하여 방재등급을 유지하고 직립형 방음판(H=9.0m) 및 저소음포장으로 소음기준치 만족시킴.

❍ 그러나, 주민들은 이격부 없이 무조건 방음터널이 연속되도록 변경시공을 요구하였고, 주민들과 수차례 주민협의회를 개최하여 합의된 사항으로 일부 변경시행함이 좋을것으로 사료되며 시공사 실정보고 수량 및 공사비 산정은 적정한 것으로 판단됨.

❍ 주요수량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
방음시설(U-TYPE구간)
① 지붕부 투명판(PMMA)	m	-	165	165
②투명방음판(H=3.0m 이하) 설치	㎡	-	110	110
③ 흡음방음판(H=3.0m 이하) 설치	㎡	-	155	155
④ 철골가공 및 조립	㎡	-	34,550	34,550
⑤ 소음감쇠기 설치	m	-	116	116
철 골
① RAFTER BEAM	kg	-	15,826	15,826
② SUPPORT 및 TIE BEAM	kg	-	8,521	8,521
③ AL COVER	m	-	31,316	31,316
④ PAD	m	-	21,160	21,160
⑤ GASKET	m	-	6,771	6,771
방음벽 철거
① 투명방음판 철거	㎡	-	369	369
② 흡음방음판 철거	㎡	-	460	460
③ 철골재철거	kg	-	39,735	39,735
④ 소음감쇠기 철거	m	-	102	102

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
직 공 비	377,816	615,418	237,602
제 잡 비	77,984	149,882	71,898
총공사비	455,800	765,300	309,500

(단위 : 천원)

※ 기계약단가를 우선 적용하고, 신규비목단가는 강제협의율(84.64%) 적용

검토의견

❍ 광명 신촌휴먼시아APT 옆 방음터널에 대한 민원에 대하여 지역구 국회의원, 시의원 및 주민들과 몇차례 협의회를 거쳐 쌍방간 입장을 좁혀 어렵게 도출한 합의안으로 방음시설 일부를 변경 추진코자 하는 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.