문서번호	시설개선과-7833
결재일자	2018.9.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장
안현미	이영교	09/17 정경수
협 조
	운영기획과장		김남대

『잠실종합운동장 수목 가지치기공사』

설계변경 보고

2018. 9

체육시설관리사업소

[시설개선과]

『잠실종합운동장 수목 가지치기공사』

설계변경 검토보고

“잠실종합운동장 수목 가지치기공사”와 관련하여 계약물량 변경, 보험료 정산에 따른 설계변경 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 함.

Ⅰ		관련 문서

○ 「잠실종합운동장 수목 가지치기공사」실정보고(시설개선과-2244,2018.03.19.)

Ⅱ		공사 개요

○ 공 사 명 : 잠실종합운동장 수목 가지치기공사

○ 공사기간 : 2018. 2. 12. ~ 2018. 9. 28.

○ 대 표 자 : 새암조경 주식회사 대표 류제진

*************************

*******************************

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 계약 물량 변경: 약전지 276주→298주, 강전지 527주→509주

○ 신규 공정 발생: 수목 제거 6주(은행나무 열매로 인한 악취민원 해결)

□ 설계변경 금액

변경전	변경후	증·감
118,876,140원	117,139,000원	감1,737,140원

************

**************************************************************************************************

*****************************************************

*****************************************************************

□ 검토의견

○ 위 변경사항을 반영하여 설계변경을 시행하고, 공정 및 품질관리에 최선을 다하고자 함.

붙  임 : 1. 공사 실정 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증대장 1부.  끝.