＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	계약의뢰(2018년 서초구 관내 상수도공사-장기계속단가 1차)

우리사업소에서 시행중인 『2018년 서초구 관내 상수도공사-장기계속단가1차』와 관련하여 아래와 같이 설계변경에 따른 계약의뢰하고자 합니다.

1. 공 사 명: 2018년 서초구 관내 상수도공사-장기계속단가1차

2. 공사개요

- D=15~300㎜ (당초)L=2,618m, (변경)L=2,074m(감544m)

3. 공사기간: 2018. 5. 2. ~ 2019. 6. 30.

***********************

5. 예산과목

- 상수도사업비, 영업비, 급수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비, 상하수도관교체비, 교체장애수전

- 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비), 보온재교체

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

- 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사)

6. 설계변경 사유: 공종별 계약물량 증·감 및 신규공종 발생

7. 변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	915,991,800	915,991,800	증·감없음

붙임:  방침서 및 설계변경 내역서 등 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	최지영		시설관리과장	09/17 편병률
협조자
시행	시설관리과-16621	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4892	/전송	3146-4939	/		/	부분공개(5)