문서번호	물재생계획과-11450
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장	물순환안전국장
김상훈	김준형	하상문	09/17 배광환

하수관로유지관리 이력 정보 구축  및 실태평가 용역 시행계획

2018. 9

물순환안전국

【물재생계획과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

하수관로 유지관리이력 정보 구축

및 실태평가용역 시행계획

노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진조례에 따라 하수관로 상태 분석을 통한 중장기 관리계획 수립을 위한 실태평가 용역을 시행하고자 함

▢ 추진근거

○ 서울특별시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진조례

- 부칙 제2조(실태평가보고서 최초 작성) 실태평가 보고서 최초 작성은 2019년 12월 31일까지로 한다

▢ 추진경위

○ 2017.12.11.: 기술용역타당성 심사완료(적정)

○ 2018. 7.26 : 과업내용서(안) 작성통보(안전총괄과)

○ 2018. 8. 8. : 건설기술심의 요청(용역발주심의)

○ 2018.8.31. : 건설기술심의 의결사항 조치결과 제출

○ 2018. 9.7.  : 건설기술심의(용역발주심의) 결과 통보

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 하수관로 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가

○ 용 역 비 : 396백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 14개월

○ 용역대상 : 하수관로 L=10,165.1km

○ 주요내용

- 빅테이터 분석 시스템 개발 지원

- 실태평가 보고서 작성

· 하수관로 중장기 분석

· 하수관로 관리계획(익년도 및 중장기) 수립

· 예산규모에 따른 실태평가보고서(익년도 및 중장기관리계획) 조정

▢ 용역 수행방안

○ 추진방안 : 건설기술 용역으로 시행

○ 입찰방법 : 일반입찰

○ 계약방법 : 단독 또는 공동도급계약(공동이행방식)

○ 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약

○ 입찰참가자격

- 건설부문(상하수도, 구조) 엔지니어링업체 등록을 필하고, 해당 분야별 기술자를 보유한 업체 또는 상기 분야의 기술사사무소를 개설 등록한 업체

-「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 토목 또는 종합분야로 등록한 업체

▢ 향후계획

○ ‘18. 9.20. : 발주의뢰(재무과)

○ ‘18. 9.28. : 입찰공고

○ ‘18.10.20. : 제안서 접수

○ ‘18.10.25 : 제안서 평가위원회 개최

○ ‘18.10.31 : 기술협상

○ ‘18.11월 : 용역 계약 및 착공

붙임 : 1) 과업내용서 1부

2) 설계내역서 1부.  끝.