투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약 의뢰(2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사)

1. 기반시설과-2620호(2018.09.13.)와  관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 노후 막재 교체공사

나. 계약기간 : 2018. 4. 6. ~ 2018. 9. 21.

다. 도 급 액 : 금339,867,000원

라. 도 급 자 : 물춤워터아트㈜(대표: 신건수)

마. 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독1처)

바. 변경내용

구 분	정산			비 고
	당 초	변 경	증·감
공급가액	308,970,000	309,582,728	증) 612,728
부가가치세	30,897,000	30,958,272	증) 61,272
도급비	339,867,000	340,541,000	증) 674,000

사. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약내역 오류 정정

아. 예산과목 : 한강공원시설 관리및개선, 한강공원 수영장유지관리, 시설비

붙임  1. 설계변경 시행 보고서 1부

2. 설계변경(정산) 보고서(공사감독1처-6420호) 1부.

3. 설계변경 도서 1부

4. 계약금액 검증 확인서 1부.  끝.

	시설부장
주무관	박지수		기반시설과장	라철흠		시설부장	09/17 전영주
협조자	주무관	김경화		총무과장	박병현		기획예산과장	문영일
시행	기반시설과-2646	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)