문서번호	토목부-16330
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	09/18 김영수
협조
	주무관		남덕희

진성연립 옹벽 안전진단 및 방음벽 철거 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9

도시기반시설본부

(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

진성연립 옹벽 안전진단 및 방음벽 철거 검토보고

○ 현재 도로관리과에서 진성연립 건물을 철거하고 공원을 조성중이며, 박미지하차도 도로경계와 공원사이에 진성연립 옹벽이 위치하고 있음.

○ 도로관리과와 도로계획과의 협의결과(강남순환도로 4공구에 포함하여 옹벽 정비)에 따라 옹벽 조치계획 검토보고 드림.

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,856억원(도급비 1,952억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11. 30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜ / ㈜서영엔지니어링

관련 추진경위

❍  2018.04.27. : 남부도로사업소 공원관련 업무협의(도로관리과→도로계획과)

- 도로계획과에서 확대보상한 부지의 옹벽은 도로옹벽으로 관리 필요

❍  2018.05.18. : 업무협의 회신(도로계획과→도로관리과)

- 시흥동 963번지 옹벽은 박미지하차도에 포함하여 정비 조치할 예정

❍  2018.05.21. : 업무지시(토목부→건설사업관리단)

- 옹벽정비계획 수립 지시

건설사업관리단 검토의견

❍ 진성연립 옹벽은 유관부서 협의결과에 따라 4공구에서 정비토록 결정된 바, 옹벽은 안전진단 시행 결과 전반적으로 양호한 상태이며 외관 보수·보강 정비하면 기능상·안전상 문제가 없을것으로 판단되고, 옹벽 상단의 낡은 방음벽은 보행자 안전을 위해 철거함이 바람직함.

❍ 위치도 및 현황사진

❍ 옹벽 안전진단 시행((주)한맥도시개발, 2018.6.11.~6.20)

구 분	내 용
점검결과	∙ 전면부 단면손상부 : 단면복구(T=50) ∙ 전면부 균열(0.3㎜이상) : 에폭시수지주입 ∙ 전면부 배수구 막힘 : 청소
외관조사상태 결과	∙ 전면부(벽체) : A, 배수시설 : B, 기초부 : A
안전성 평가결과	∙ 구조검토 결과 → A등급
종합평가 및 안전등급	B등급

❍ 옹벽 상단부 기존방음벽 철거

- 진성연립 철거로 기능을 상실한 30년된 노후 방음벽 철거

❍ 주요수량 증·감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
구조물 안전진단
안전진단	식	-	1	1
해체 및 철거공사
흡읍방음판 철거	㎡	-	180	180
폐기물 상차	㎥	-	120	120
비계설치 및 해체	㎡	-	584	584

❍ 공사비 증·감현황

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
순공사비	-	15,802	15,802
제 잡 비	-	8,198	8,198
안전진단비	-	15,000	15,000	제잡비 제외
총공사비	-	39,000	39,000

(단위 : 천원)

검토의견

❍ 진성연립 옹벽은 유관부서(도로관리과, 도로계획과)간 협의결과에 따라 당현장에서 정비토록 결정된 바, 옹벽 구조물 안전진단 시행과 옹벽 상단의 방음벽 철거를 추진코자하는 건설사업관리단의 상기 실정보고는 적정하므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.