문서번호	토목부-16411
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김동수		안규홍	09/18 김영수
협 조
	토목총괄과장			이동훈
	터널건설과장			박일연

- 월드컵대교~서부간선도로간 연결로 설치 실시설계 -

자문의견 처리 계획 검토 보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(토목부)

- 월드컵대교~서부간선도로간 연결로 설치 실시설계 자문회의 -

자문의견 처리 계획 검토 보고

월드컵대교~서부간선지하도로 연결로 실시설계 자문의견에 따라 성산대교 남단 성능개선공사 가교철거와 연결로 교각 설치 공사시기 중첩 발생에 따른 처리 계획을 검토 보고드림.

[토목부-12935호(2018. 7. 24.) 자문회의 개최결과 보고]

□ 사업개요

1. 월드컵대교~서부간선지하도로 연결로 설치

❍ 위    치 : 서울시 영등포구 양평동(성산대교 남단)

❍ 용역규모 : 연결로 신설 폭1차로, 연장 1.62km

- 램프 A (서부간선 → 월드컵대교) - 램프 B (노 들 로 → 월드컵대교) - 램프 C (월드컵대교 → 서부간선) - 램프 C-1(노 들 로 → 서부간선)	: 폭 6.95m, : 폭 6.95m, : 폭 6.95m, : 폭 5.75m,	연장 279.1m 연장 692.1m 연장 360.7m 연장 289.9m

❍ 용역기간 : 2017. 4. ~ 2018. 9.

❍ 총사업비 : 220억원

❍ 설 계 자 : 서부간선지하도로 민간사업자 - ㈜유신, ㈜서영엔지니어링

❍ 설계감리 : ㈜제일엔지니어링

2. 성산대교 남단  성능개선 공사

❍ 위    치 : 영등포구 양화동(서부간선도로)

❍ 사업규모 : 성산대교 구조안전성 검토 및 성능개선

- 접속교 슬래브 철거․신설, 램프교 구조물 보수․보강, 가교설치

❍ 공사기간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.(24개월)

❍ 총사업비 : 184억원

❍ 시 공 자 : ㈜한신공영 1개사

❍ 시공감리 : ㈜도화엔지니어링

□ 자문의견 내용

❍ 월드컵대교~서부간선도로 연결로 설치공사 A, B램프 교각과 성산대교남단 성능 개선 공사 가교 설치 위치가 중첩됨에 따라 공사 완료에 차질이 발생되지 않도록 연결로 교각 위치 검토 또는 시공 시기를 협의하여 설계에 반영

□ 자문의견 처리 검토

❍ 시공시기 검토

- 성산대교남단 성능개선공사(㈜도화엔지니어링 성산퇴계(건) 2018- 474호, '18. 8. 29.)

· 공사기간 : '18. 1. 1. ~ '19. 12. 31.

· 검토의견 : 예산배정이 원활할 경우 예정공정표 대로 공사 추진 가능

· 현안사항 : 성산대교 남단 성능개선 공사 완공에 소요되는 예산은 총 210억 원이나 130억원만 2019 예산으로 반영될 예정으로 완공을 위한 부족예산 80억원은 확보가 불확실한 실정임(터널건설과와 교량안전과 협의 의견임.)

- 월드컵대교~서부간선도로 연결로 설치공사(서서울 건설 제2018-267호, 2018. 9. 4.)

· 공사기간 : '20. 1.~'21. 3.

· 검토의견 : 서서울도시고속도로(주)는 중첩구간의 교각(P9)의 착수 시기에 대하여 서부간선지하도로 개통시기('21. 3.)를 감안하면 '20. 1.부터는 공사 착수되어야 하는 것으로 분석 제출(P9 공기 : 14.5개월이 소요)

❍ 검토결과

- 2개 공사의 시공시기가 중첩되지 않아 성산대교 남단 성능 개선 공사가 예정공기내 완공될 경우 별도 설계변경 불필요

- 성산대교남단 성능 개선 공사 완공을 위한 '19 예산확보 부족으로 공사지연이 우려됨에 따라, 연결로 설치공사 적기완공을 위하여 성산대교 남단 성능개선 공사의 가교 이설 필요

· 성산대교 남단 성능 개선 공사 가교 변경 검토 도면

당 초	변경 검토(안)

□ 조치계획

❍ 성산대교남단 성능 개선 공사가 2019년 완공을 위한 예산편성 부족으로 월드컵대교~서부간선도로 연결로 설치공사 A, B램프 교각(노선이 확정되어 교각위치 조정 불가)과 성산대교남단 성능개선 공사 가교 철거 시공기간 중첩이 예상됨에 따라

❍ 성산대교남단 성능개선 공사에서 예산확보 상황 및 공정을 분석하여 가교 설치 위치 변경 검토가 필요함.

붙임 : 1. 자문회의 개최 결과 보고 1부.

2. 중첩구간 검토서–월드컵대교~서부간선 연결로 [서서울도시고속도로(주)] 1부.

3. 중첩구간 검토 - 성산대교 남단 성능 개선[(주)도화엔지니어링] 1부.

4. 2019년 예산 사업설명서(성산대교 남단) 1부.  끝.