문서번호	기전과-5248
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장
박신범	09/18 정판식

『2018년동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

제1차 기성준공 보고

2018. 9.

동부도로사업소

(기전과)

『2018년동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

제1차 기성준공 보고

「2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)」의 기성준공 검사결과가 감리사로부터 접수되어 검토 후 보고 드림

□ 관련근거

○ 2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 제1회 기성준공검사 결과보고 - 대영유비텍(주) 대영GE18B-09-22호(2018.09.17.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018.3.7. ~ 2018.12.28.

○ ********************

○ *********************

○ *******************

□ 1회 기성준공 개요

○ 준공대상 : 강동구 양재대로 1497 라인아파트 앞 외 5개소

○ 준공일자 : 2018. 9. 14.

○ 기성검사

구 분	소 속	직 급	성 명	비 고
검 사 자	********	******	*****
입 회 인	********	*****	*****
	********	*****	*****
	*******	*****	*****
	*******	***	*****

○ 주요 기성 물량

순번	위 치	신설 및 교체현황								소요 예산	비 고
		신호지주(본)		신호등(면)		제어기(대)		음향신호기(개)
		신설	이설 (교체)	신설	이설 (교체)	신설	이설 (교체)	신설	이설 (교체)
1	천호동 314	4	-	8	-	-	1	2	-	52,699천원	규제
2	대치동 967-6	3	-	4	-	-	-	2	-	26,066천원	규제
3	성내동 591	4	-	6	-	-	-	2	-	31,036천원	규제
4	길동 367-1	4	-	8	-	-	1	2	-	58,723천원	규제
5	고덕동 312	2	-	5	-	-	-	2	-	36,079천원	규제
6	거여동 133-10	2	-	6	-	-	-	2	-	25,130천원	규제
	총 6개소	19	0	37	0	0	2	12	0	229,737천원

○ 기성준공금액                                               (단위 : 원)

****	****	*****	*****	*****	****
***********	*	***********	***********	***********	산재,고용보험료 등 제외

□ 보고자 의견 및 조치계획

○ 감리사로부터 접수된 기성준공 결과 보고서를 검토한 결과 적정하다고 판단되어 기성 준공처리 하고자 함.

붙임 : 1. 기성준공검사 결과보고 공문 1부.

2. 기성준공 내역서 1부. 끝.