문서번호	시설관리과-2426
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
김영후		한흥태	09/18 전영주
협조
	총무과장		박병현

공사 설계변경 시행 보고(정산) 한강공원 자전거도로 개선공사

2018. 09

시  설  부

(시설관리과)

공사 설계변경 시행보고(정산)

《 한강공원 자전거도로 개선공사 》

안전사고가 자주 발생하는 한강공원 자전거도로 일부 구간을 보행자 위주로 개선하여 안전사고를 저감하고자 추진중인“한강공원 자전거도로 개선공사” 에 대하여 현장여건에 따른 일부 공종별 계약물량 및 도급비 변경에 따라 설계변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 한강공원 자전거도로 개선공사

▢ 위    치 : 한강공원 자전거도로 잠원수영장 등 6개소

▢ 규    모

○ 경계석 설치 200m, 아스콘 포장 391a, 차선도색 7,362m 등

***************************

************************************************

▢ 공사기간 : 2018.03.09. ~ 09.20

*************************

변경사유 및 현황

▢ 주요 변경 내용

○ 시공물량 변경에 따른 물량 증 감

○ 보험료 및 안전관리비 등 정산

▢ 물량 증․감 현황

공 종	단위	물 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
아스팔트포장	a	371	391	20
경계석 설치	m	170	200	30
교통표지판 설치	EA	28	28	0
차선도색	m	7,677	7,362	감)315

▢ 설계변경(정산)

(단위 : 원)

*****	*****	*****	***********	***
****	*************	*************	*
*****	***********	***********	***********
*****	*************	*************	**********
*****	**********	**********	************

조 치 의 견

▢ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 공사 준공에 만전을

기하고자 함.

첨   부 : 1.변경내역서(정산) 1부.

2.정산 관련 서류 각 1부.   끝.