문서번호	계약심사과-4594
결재일자	2018.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		류종기	03/13 안호
협 조

차집관로 성능개선 실시설계 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2018. 03.

계약심사과

차집관로 성능개선 실시설계

설계경제성(VE) 심사 실행계획

물재생시설과에서 시행하고 있는「차집관로 성능개선 기본 및 실시설계용역」에 대해 심사전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

2		심사개요

□ 추진부서 : 물순환안전국(물재생시설과)

□ 용  역  명 : 차집관로 성능개선(실시설계)

□ 위    치 : 서울시 전역

□ 사업내용 : 통수능 부족관로 및 우수토실 정비

- 사업규모 : 차집관로 개량(D500㎜~□1.8m, L=10,836.2m)

□ 공 사 비 : 49,011백만원

□ 용역기간 : ’16.4. ~ ’18.3.

□ 설계공정률 : 97%(실시설계)

※ 특이사항 : 4개 물재생센터에서 계약심사를 분리하여 신청 예정

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVS) 허재영 소장 한국가치기술연구소 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임장경 주무관 계약심사과	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (5명)	▸ 외부 검토위원 5명 - (상하수도) 조계현 부장 하남도시공사 - (상하수도) 서대식 상무 바셈 - (상하수도) 김낙진 팀장 현대엔지니어링 - (토질) 여규권 부장 삼부토건(주) - (토질) 김성희 전무 범한엔지니어링	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	▸ 발주담당, 설계업체 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’18.03.21(수) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.03.29(목) 10:00~17:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.03.30(금) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.04.05(목) 14:00~18:00	- 최종 검토회의 : 제안 채택회의 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’18.03.09		설계경제성 심사 신청 (발주기관)		▸심사 신청서 접수
		’18.03.13		설계경제성 심사 계획수립 (VE 담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설계경제성심사운영		’18.03.21 ~ ’18.04.05 (12일)		설계경제성 검토회의 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 의사결정
		’18.04.06		제안 채택결과서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸채택 검토회의 결과서 통보
		’18.04.06 ~ ’18.04.12 (5일)		심사 결과보고서 작성 (계약심사과)		▸설계경제성 최종 결과보고서 작성 및 검토
		’18.04.13		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸심사결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 11,993천원

○ 외부전문가 수당 : 11,593천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,689천원(2,689천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 6,860천원(1,372천원 × 5명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,044천원(1,022천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 400천원

□ 예산과목

○ 신청부서(물순환안전국 물재생시설과)에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - -  - - -  ’18.4.13

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.