투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구) 변경 계약의뢰(총괄5회, 3차1회)

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』과 관련하여 공구경계 조정 및 감리원 투입계획 변경으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰(총괄5회, 3차1회) 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

2. 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

3. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011.11.01 ~ 2021.09.07	2011.11.01 ~ 2022.03.07	증) 181일
1 차(1회)	2018.04.06 ~ 2019.05.19	2018.04.06 ~ 2019.04.20	감) 29일

4. 용역금액 조정 내역

(단위 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총 괄(5회)	2,792,090,000	3,334,690,000	증)542,600,000	- 공구경계 조정
1 차(1회)	652,000,000	652,000,000	-	- 감리원 투입계획 조정

5. 예산과목 : 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비(도시철도특별회계)

붙  임   1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 총괄 5회 및 3차 1회 변경설계서 각 1부.

3. 전면책임감리용역 계약 변경요청 공문 1부.

4. 합의각서 각 1부.  끝.

	도시철도사업부장
주무관	김종필		경전철2과장	권영민		도시철도사업부장	09/18 박동룡
협조자	경리과장	이현숙
시행	도시철도사업부-8908	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프리미어 프레이스 빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02)772-7178	/전송	02)772-7305	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(5)