문서번호	주거재생과-10897
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생계획팀장	주거재생과장
이수진		서정권	09/18 이동일
협조

해방촌 신흥시장 환경개선사업 설계용역

준공기한 연기 검토 보고

2018. 09.

도시재생본부

(주거재생과)

해방촌 신흥시장 환경개선사업 설계용역

준공기한 연기 검토 보고

해방촌 도시재생 마중물사업으로 추진중인 『해방촌 신흥시장 환경개선사업 설계용역』수행 결과의 완성도를 보다 높이고자 상호 협의하에 용역기간을 연장하여 추진코자 함.

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 해방촌 신흥시장 환경개선사업 설계용역

❍ 계약기간 : ’17.12.28. ~ ’18.09.30.

❍ 용 역 비 : 금78,297,000원(부가세 포함)

❍ 용역업체 : 유아이에이건축사사무소(주)(대표 손종현)

Ⅱ		추진현황

❍ ’17.12.28 : 용역계약 및 착수

❍ ’18.01.17 : 착수보고

❍ ’18.02~03 : 현황조사 및 측량

❍ ’18.02.19 : 용산구 보고(도시관리국장, 관련부서장)

❍ ’18.2.27/3.30/5.25 : 주민설명회(상인회, 임차인 등)

❍ ’18.03.23 : ETFE 시공사례 답사(상인회장, 주민협의체대표, 시·구·센터)

❍ ’18.04.10 : 시·구 관계부서, 센터, 용역사 회의

❍ ’18.04.20 : 구조 자문회의

❍ ’18.06.01 : 공정보고(주거사업기획관, 시·구·센터)

❍ ’18.08.31 : 시·구 소통회의(주거사업기획관, 시·구 과장, 팀장)

Ⅲ		계약변경 사항

❍ 계약변경 내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	’17.12.28~’18.09.30	’17.12.28~’18.12.31	3개월 연장
용 역 비	금78,297,000원(부가세 포함)		변경 없음
용역업체	유아이에이건축사사무소(주)(대표 손종현)		변경 없음

❍ 용역기한 연장사유

- ****************************************************************************

- *************************************************************

Ⅳ		향후계획

❍ ’18.10 : 관계부서 협의, 주민설명회 및 건축협정 추진 등

❍ ’18.11 : 구조검토 및 실시설계

❍ ’18.12 : 행정협의 및 계약심사 등 사전절차 이행

붙 임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 공정계획표 1부.