투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연장 계약의뢰(탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업)

우리 본부에서 건설사업으로 시행중인 「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계약금액

구 분	전 체 분(원)	1차분(원)	비 고
도 급 비	12,292,310,700	8,506,700,000

다. 공사기간 : 2017.09.01. ∼ 2019.12.15.

라. 계 약 자 : 백상건설㈜외 2개사

마. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
전체분(2회)	2017.09.01. ~ 2019.12.15.	2017.09.01. ~ 2019.12.20.	증)5일
1차분(2회)	2017.09.01. ~ 2019.02.14.	2017.09.01. ~ 2019.04.01.	증)46일

바. 예산과목 : 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산,

시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송영배		치수시설과장	조성만		방재시설부장	09/18 이임섭
협조자
시행	방재시설부-12277	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개