＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(태양광발전장치 조달구매)

1. 시설관리과-21603(2018.09.10.), 시설관리과-22306(2018.9.18.)호 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인『태양광발전장치 조달구매』건에 대한 납품기한 연기를 요청합니다.

가. 변경내용

건 명	납품요구번호 (계약번호)	물품대(원)	조달수수료(원)	납품기한
				당초	변경
태양광 발전장치 조달구매	12-18-2-36431-00 (00178068003)	31,635,000	162,280	2018. 9. 30.	2018. 12. 20.
	12-18-2-36434-00 (00187008300)	84,224,640	432,070	2018. 10. 30.	2018. 12. 20.

나. 변경사유 : 건축허가로 인한 지연 및 감리비 추가요청으로 인한 감리용역 지연

붙임 : 1. 관련보고서 각 1부.

2. 합의서 각 1부.  끝.

	시설관리과장
★주무관	김혁		기전팀장	代배승철		시설관리과장	09/18 김기상
협조자
시행	시설관리과-22423	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개