문서번호	도로보수과-8603
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		유태용	09/18 김용제
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제 4차 작업계획 보고

2018. 09.

강서도로사업소

[도로보수과]

제 4차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 09. 18. ~ 2018. 10. 31.

○ 시 공 사 : 이에스피건설 대표 강 상 수

○ 도 급 비 : 금269,043,410원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	남부순환로, 구로IC	노측용 차량 방호울타리 철거	50경간	√
2	남부순환로, 구로IC	전지 작업	30주	√		신규공종
3	남부순환로, 신월사거리	중앙분리대용 방호울타리 철거	78경간		√
4	남부순환로, 신월사거리	중앙분리대 연석 철거	추후정산		√	신규공종
5	안양천로, 현대 3차 아파트 앞	노측용 차량 방호울타리 철거	27경간	√
6	안양천로, 현대 3차 아파트 앞	전지 작업	30주	√		신규공종
7	오정로, 강서구 오쇠동 175-3	반사경 설치	1개	√
8	가마산로 162 앞	시선유도봉 설치	28개	√
9	의사당대로, 여의도역~샛강역	시선유도봉 설치	50개	√
10	수명로, 마곡수명산파크 3단지 앞	강성 방호울타리 이설	44경간	√		신규공종
11	수명로, 마곡수명산파크 3단지 앞	충격흡수시설 이설	1개	√		신규공종
12	화곡로 207 앞	반사경 설치	1개	√
13	경인로 343 삼환로즈빌앞	무단횡단금지시설 가로봉 정비	10개	√
14	영등포로, 오목교 인접 안전지대	시선유도봉 설치	20개	√
15	남부순환로 화곡로입구 교차로	시선유도봉 설치	20개	√
16	오목로, 오목교 진입구간	중앙분리대용 방호울타리 철거	17경간	√
17	공원로, 구로동 70-5	시선유도봉 설치	20개	√		민원
18	개봉로, 개봉고가차도 ~ 개봉교	무단횡단금지시설 정비	20개	√		민원
19	신정교 동단, 도림천로 접속부	시선유도봉 설치	20개	√		민원
20	노들로, 당산동6가 92-8	시선유도봉 설치	10개	√		민원
21	여의서로, 양천우체국 건너편 안전지대	시선유도봉 설치	20개	√		민원
22	목동서로, 양천공원 교차로	시선유도봉 설치	20개	√		민원
23	목동서로, 목동9단지 교차로	시선유도봉 설치	10개	√		민원
24	국회대로, 신월IC 램프	갈매기표지 설치	3개	√		민원
25	안양천로, 목동 공영주차장 건너편	시선유도봉 설치	10개	√		민원
26	여의대로, 여의도공원 앞 교차로	시선유도봉 설치	20개	√		민원

※추후 현장여건에 따라 지시물량의 경미한 변경 가능

○ 신규추가공종 (※신규추가공종은 설계변경 시 반영하여 정산)

- 전지 작업

⦁노측용 차량 방호울타리 정비를 위한 부속작업

- 중앙분리대 연석 철거 및 포장

⦁중앙분리대용 차량 방호울타리 정비를 위한 부속작업

- 강성 방호울타리 이설

⦁소내 폐기물 집하장 정비를 위한 부속작업

- 충격흡수시설 이설

⦁방호울타리 연장 추가(단부 위치 변경)에 따른 충격흡수시설 위치 변경

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에 작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제4차 작업지시

- 작업위치 : 남부순환로 구로IC 등

- 작업기간 : 2018. 09. 18. ~ 2018. 10. 31.

- 공종 및 물량 :“별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 20,216천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

도 급 비 (A)	기 집행 공사비(B)			금회사용(4차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
	기 성	3차 작업(예상)	소 계
269,043,410	198,572,000	86,119,000	284,691,000	20,216,000	-35,863,590

※도급비 초과분에 대하여는 낙찰차액 및 잔여관급비 활용하여 정산 및 설계변경 시행

※도급비 가용 예산

- 낙 찰 차 액 : 38,516,590원

- 잔여 관급비 : 10,170,570원

- 합       계 : 48,687,160원

붙임 1. 작업지시서 및 위치도 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.