문서번호	건축부-13402
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	09/18 임인구
협 조

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고

스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역과 관련하여 물가변동에 의한 계약금액 조정 요청서가 제출되어 검토 결과를 보고함.

용역개요

용 역 명 : 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역

용역업체 : ㈜희림종합건축사사무소, ㈜토문엔지니어링 건축사사무소

용역기간 : *****************************

용 역 비 : ********************************

차수별 계약현황

구분	용역금액(원)	기간	비고
총차	*************	*************************
1차	***********	*************************
잔여분	*************	************************	예정

계약금액 조정 사유 및 근거

조정 사유 : 물가변동으로 인한 계약금액 조정

관련근거

- 지방계약법 제22조, 같은 법 시행령 제73조 및 같은 법 시행규칙 제72조

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제21호, 2018. 1. 10.) 제 14장 용역계약 일반조건 제6절 제2호 물가변동으로 인한 계약금액 조정

- 『국토교통부 고시 제2017-414호(2017.06.20.)』에 의한 건설기술용역대가 등에 관한 제3장 건설사업관리 대가기준 제7조(대가의 조정)

계약금액 조정요건 검토

조정요건 : 기간요건, 변동요건 및 절차상 요건이 모두 충족되어야 함.

- 기 간 요 건 : 계약체결일로부터 90일 경과

- 변 동 요 건 : 입찰일을 기준으로 품목조정률이 100분 3(3.0%) 이상 증감

- 절차상 요건 : 계약상대자의 조정 청구

입  찰  일(기준시점) : 2017.09.12.

계약체결일(기준시점) : 2017.09.18.

조정기준일(비교시점) : 2018.01.01.

검토결과

- 기간요건 : 계약체결(기준시점)일로부터 90일 경과 ⇒ 적합

- 변동요건 : 품목조정률 ***** 증가 ⇒ 적합

- 절차상 요건 : 계약상대자 ㈜희림종합건축사사무소 계약금액 조정 요청

[HAP18-0912-1991(2018. 9. 12.)호] ⇒ 적합

계약금액 조정 내역

구 분	금 액	비 고
***********	**************
**************	************	************* *******************
****************	**************
*******	*****	************
*******************	***********	*******
**********************	**************
****************	********	*************************
*******************	**************	**************

※ 물가변동 원가계산 용역기관: 한양경제경영연구소

처리의견

물가변동으로 인한 계약금액조정 요청사항에 대하여 검토한 바 적정하다고 판단되므로 총차 및 1차 계약금액을 조정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
용역기간	총차	*********************	*********************	****
	1 차	*********************	*********************	****
계약금액	총차	*************	*************	*************
	1 차	***********	***********	*************

붙임 : 1) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 제출공문 1부.

2) 물가변동으로 인한 건설사업관리용역 계약변경 요청공문 1부.

3) 물가변동에 따른 산출내역서 및 비교표 1부.  끝.