문서번호	방재시설부-12228
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		조성만	09/18 이임섭
협조
	경리과장		이현숙

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

준공기한 연기 및 예정공정표 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

준공기한 연기 및 예정공정표 변경 검토 보고

제1처리장 반송수관로 이설구간의 굴착심도가 깊어지고 퇴적층 및 지하수위 상승으로 지반붕괴에 따른 가시설공법 변경 및 폭염경보에 따른 공사중지를 감안한 준공기한 연기 및 예정공정표 변경에 대한 검토 보고 임.

□ 관련근거

○ 탄천하감 2018-311(2018.9.17.) : 공사기간 연장 및 예정공정표 변경 승인요청

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

○ 위    치 : 서울시 강남구 개포로 625일원(탄천물재생센터 내)

○ 공사규모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

- 1처리장 245,000㎥/일, 2처리장 205,000㎥/일

○ 총공사비 및 공사기간                                 (단위 : 천원)

구 분	전 체	1 차 분	장 래
총공사비	15,949,925	10,892,700	5,057,225
도 급 비	12,292,311	8,506,700	3,785,611
관 급 비	3,657,614	2,386,000	1,217,614
공사기간	`17.09.01.~`19.12.15.	`17.09.01.~`19.02.14.	`19.02.15.~`19.12.15.

○ 시공사/사업관리 : 백상건설(주)외 2개사/㈜선진엔지니어링종합건축사사무소외 3개사

○ 예산과목

- 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비

□ 추진현황

○ `18.04.30. : 반송수관로 작업중지 보고(시공사→건설사업관리단)

○ `18.05.10. : 작업중지 및 대체공법 제시 요청(건설사업관리단→시공사)

○ `18.05.16. : 대체공법 발주청 협의(건설사업관리단→방재시설부)

※ Sheet-Pile공법은 공사비 고가 및 공사기간이 길어 재검토

○ `18.06.05. : 가시설공법(TSPL공법) 실정보고(시공사→건설사업관리단)

○ `18.06.15. : 실정보고 검토 보고(건설사업관리단→방재시설부)

○ `18.06.19. : 실정보고 승인(방재시설부→건설사업관리단)

□ 검토내용

[준공기한 연기]

○ 1처리장 반송수관로 흙막이 가시설공법 검토 소요일수(1차분 적용)

- 연장일수 : 41일(`18.05.10. ~ `18.06.19.)

○ 폭염경보에 따른 공사 중지(전체분, 1차분 적용)

- 연장일수 : 5일(8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.15)

구 분	당 초	변 경	비 고
전체분	`17.09.01. ∼ `19.12.15.	`17.09.01. ∼ `19.12.20.	증)5일
1차분	`17.09.01. ∼ `19.02.14.	`17.09.01. ∼ `19.04.01.	증)46일

[예정공정표 변경]

구 분	변 경 사 유	비 고
가시설공법 변경	가시설공법 변경으로 인한 1처리장 지연발생(41일)	주공정선(CP) : 1처리장
폭염경보 공사중지	폭염경보에 따른 공사중지(5일)

※ 변경 예정공정표 별첨

□ 검토의견

○ 제1처리장 반송수관로 이설중 현장여건 변경에 따른 흙막이 가설공법(TS판넬→T.S.P.L)변경 검토 및 폭염경보에 따른 공사중지(46일)에 대한 전제분, 1차분 준공기한을 연장함이 타당할 것으로 판단되며,

○ 가시설 공법변경 및 폭염경보에 따른 공사중지 사항을 반영하여 예정공정표를 변경함이 타당할 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토 의견과 같이 실정보고 사항을 승인처리하고 준공기한 연기계약을 의뢰하고자 함.

붙임  감리단 실정보고서 1부.  끝.