문서번호	도시철도사업부-8904
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		경전철2과장		도시철도사업부장
김종필		권영민		09/18 박동룡
협 조
	주무관				이덕배

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』관련

용역계약 변경(총괄 5회 및 3차 1회) 검토 보고

2018. 9.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』관련

용역계약 변경(총괄 5회 및 3차 1회) 검토 보고

『신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』공구경계 조정 및 공사비 증·감에 따른 용역계약 변경(총괄 5회 및 3차 1회) 검토 보고임.

Ⅰ				용 역 개 요

◦ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

◦ 규    모 : 연장 2.287km (샛강역~대방역~보라매역, 정거장 4개소)

◦ 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

◦ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약 일	용 역 기 간	계약금액	비 고
총 괄	2011.10.25.	2011.11.01. ~ 2021.09.07	2,792,090
1차 분	2011.10.25.	2011.11.01. ~ 2017.08.31	376,000	준 공
2차 분	2017.08.29.	2017.09.01. ~ 2018.04.05	292,440	준 공
3차 분	2018.04.06.	2018.04.06. ~ 2019.05.19	652,000	진행중
잔 여	-	2019.05.20. ~ 2021.09.07	1,471,650

Ⅱ				검 토 내 용

□ 용역계약 변경 내용

◦ 관련근거

- 총괄계약금액 변경 검토보고(도시철도사업부-7569호, 2018.08.07.)

- 전면책임감리용역 계약변경 요청(동부엔지니어링 2018-2148호, 2018.9.11.)

1) 공구경계 조정에 따른 총괄 용역계약 변경

구 분	계약업체	당 초		변 경		증·감
		용역기간	금 액(천원)	용역기간	금 액(천원)
총 괄	㈜동부ENG외 2개사	’11.11.01 ~’21.09.07	2,792,090	’11.11.01 ~’22.03.07	3,334,690	증) 542,600 (증 6개월)
과업범위		연장 2,082㎞, 정거장 3개소 (0K050~2K132)		연장 2,287㎞, 정거장 4개소 (0K031~2K318)		증) 연장 205M 증) 정거장 1개소

2) 계약금액 변경에 따른 감리원 투입계획 조정

구 분		총 괄 용 역			3 차 용 역			비 고
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
계		250.92인․월	302.05인․월	증)51.13인월	60.03 인․월	60.41인․월	증)0.38인월
토목	수석감리사	2016.09.08 ~ 2021.09.07. (76.26인월)	2016.09.08 ~ 2022.03.07. (83.88인월)	증)7.62인월	2018.04.06 ~ 2019.05.19. (17.08인월)	2018.04.06 ~ 2019.04.20. (15.90인월)	감)1.18인월	총괄
	감리사	2016.09.12 ~ 2021.09.07. (59.87인월)	2016.09.12 ~ 2022.03.07. (65.87인월)	증)6.00인월	2018.04.06 ~ 2019.05.19. (13.44인월)	2018.04.06 ~ 2019.04.20. (12.51인월)	감)0.93인월	보조
	감리사보	2017.07.10 ~ 2020.02.09. (24.61인월)	2017.07.10 ~ 2022.03.07. (44.40인월)	증)19.79인월	2018.04.06 ~ 2019.05.19. (10.67인월)	2018.04.06 ~ 2019.04.20. (9.93인월)	감)0.74인월	보조
	감리사보	2018.06.01 ~ 2021.02.28. (26.20인월)	2018.06.01 ~ 2020.10.31. (23.02인월)	감)3.18인월	2018.06.01 ~ 2019.05.19. (9.20인월)	2018.06.01 ~ 2019.04.20. (8.46인월)	감)0.74인월	보조
	감리사보	2019.01.01 ~ 2020.10.10. (16.90인월)	2018.10.15 ~ 2021.09.20. (27.94인월)	증)11.04인월	2019.01.01 ~ 2019.05.19. (3.64인월)	2018.10.15 ~ 2019.04.20. (4.92인월)	증)1.28인월	보조
건축	감리사	2019.11.08 ~ 2021.09.07. (22.00인월)	2019.02.01 ~ 2019.05.30. 2020.03.01 ~ 2022.01.23. (26.74인월)	증)4.74인월	-	2019.02.01 ~ 2019.04.20. (2.66인월)	증)2.66인월	보조
기술지원감리원		2016.09.08 ~ 2021.09.07. (25.08인월)	2016.09.08 ~ 2022.03.07. (30.20인월)	증)5.12인월	2018.04.06 ~ 2019.05.19. (6.00인월)	2018.04.06 ~ 2019.04.20. (6.03인월)	증)0.03인월

Ⅲ				조 치 계 획

◦ 상기 검토내용과 같이 신림선 공구경계 조정 및 건설사업기술관리자 투입계획 변경에 따라 용역기간동안 효율적인 과업수행을 위해 총괄5회 및 3차1회 용역계약을 변경코자 함.

구분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총 괄	‘11.11.01~’21.09.07	2,792,090	‘11.11.01~’22.03.07	3,334,690	․ 계약기간 : 증) 181일 ․ 계약금액 : 증) 542,600
3 차	‘18.04.06~’19.05.19	652,000	‘18.04.06~’19.04.20	652,000	․ 계약기간 : 감) 29일 ․ 계약금액 : 변경없음

◦ 책임감리용역 변경 내용                                          (단위 : 천원)

붙 임  1. 전면책임감리용역 계약변경 요청서(관련서류) 1부.

2. 변경설계 내역서 1부.  끝.