문서번호	환경과-3731
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	총무부장
한미라		최동주	09/19 박기용
협조
	총무과장		박병현

- 2018년 화장실 제조 구매 -

납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

한강사업본부

(환 경 과)

- 2018년 화장실 제조구매 -

납품기한 연기 검토보고

한강공원 노후화장실을 교체하기 위한 「2018년 화장실 제조구매」 추진과 관련 아래와 같이 납품기한을 연기하여 설치에 만전을 기하고 함

□ 사업개요

○ 계 약 명 : 2018년 화장실 제조구매

○ 사업내용 : 노후화장실 2동 교체

○ 납품기한 : *******************************

○ 계약금액 : ********

○ 제조업체 : ***************

□ 납품기한 연기 검토내용

○ 납품기한 연기사유

- 우천 및 태풍으로 자재수급이 지연되고, 추석 연휴기간이 포함되어 있어 화장실   제작에 필요한 절대 공기 부족

○ 납품기한 연기내역

**************************

**************************.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 보고자의견

○ 불가항력(태풍, 악천우 등) 사항에 의한 납품기한 연기 요청이 있어  상기와 같이 납품기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  납품연장 요청공문 1부.  끝.