문서번호	토목부-16474
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	09/19 김영수
협조
	주무관		김동현

사토장 변경 검토 보고

【동부간선도로 확장공사 1공구】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

사토장 변경 검토 보고

【동부간선도로 확장공사 1공구】

동부간선도로 확장공사(1공구) 공사 중지 기간(‘12.01.~’17.09.)에기선정한 사토장 중 민락2택지 개발이 완료되어 토사 반입이 불가함에 따라 토사 반출을 위해 추가 사토장 선정에 대하여 검토 보고 드림

1		공사개요

❍ 위    치 : 동부간선도로 확장공사 1공구

❍ 규    모 : 도로 확장 4→6차로, 연장 1,4km

❍ 도 급 비 : 23,500백만원(6차 : 4,900백만원)

❍ 사업기간 : ’08.12. ~ ’19.12.

❍ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1

❍ 감 리 단 : ㈜도화엔지니어링

2		보고내용

❍ 기선정한 사토장 중 민락2택지 개발이 완료되어 토사 반입 불가함에 따라 토사 반출을 위한 근거리 사토장 선정이 필요한 실정임.

❍ 하천점용 허가기간(10월~5월)에 경원선 이설구간 작업 시행을 위해선 사토 반출이 시급한 실정임.

❍ 사토장 비교 현황

구 분	설 계	기선정Ⅰ	기선정Ⅱ	변경
위 치	수도권매립지	양주석산	민락2택지지구	포천시 가산면 금현리 196외 5필지
운반거리	40km	29.6km	18km	37.1km
왕복시간	154분	107분	63분	129분
사토량	37,277m3	23,038m3	14,239m3	14,239m3
운반단가	11,041원/m3	10,603원/m3	6,772원/m3	14,667원/m3
비고		완료	완료(미시행)	금회선정

❍ 사토장 위치

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

공종	규격	수량	당 초	변 경	증·(△)감
			공사비	공사비	공사비
토공	사토운반 (양주석산 29.6km)	23,038㎥	180,687	180,687	-
	사토운반 (민락택지 18.0km)	14,239㎥	71,323	-	△71,323
	사토운반 (포천농지 37.1km)	14,239㎥	-	192,597	192,597
직 접 공 사 비		1식	252,010	373,284	121,274
간 접 공 사 비		1식	57,879	79,829	21,950
물 가 변 동 액		1식	30,800	-	△30,800
도 급 액			340,689	453,113	112,424

4		조치의견

❍ 기선정한 사토장 사업이 완료되어 토사 반입이 불가하여 토사 반출을 위한 책임건설사업관리기술자의 신규 사토장 선정 보고는 적정하므로 승인 처리하고 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

❍ 인접사업장[동부간선도로 확장공사(2공구)]는 현재는 공정 진행 및 장소 협소 문제로 반입이 불가하나 추후 토사 반입이 필요하므로 지속적으로 협의·확인하여 우선적으로 2공구로 토사를 반출할 수 있도록 지시하고자 함

❍ 단가적용

- 낙찰률 67.965% 적용

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.