문서번호	설비부-13095
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		김은덕	09/19 권오식
협조

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

2018. 09.

도 시 기 반 시 설 본 부

(설 비 부)

『동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

중앙버스전용차로 개통 후 발생할 수 있는 문제점 및 기능 보완 등 운영 안정화를 위해 본 공사의 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치 전기공사

□  위    치 : 동작대로 방배경찰서 ~ 서울시계

□  공사내용 : 가로등이설 24본, 신호등주 설치 14본, 신호제어기 7면

□  공사기간 : 2017.12.11.~2018.09.30.

□  계약금액 : 금930,820,000원

□  감리/시공사 : ㈜동성엔지니어링/(주)삼영기업

2		검토근거

○ 감리사(주.동성엔지니어링) 공문 2018-186호(2018.09.18.)관련, 공사기간 연장요청 검토

○ 교통운영과-15294(2018.09.11.)관련, 도로 운영 안정화를 위한 준공기한 연기요청

3		검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 개통 후 도로에 대한 기능보완 등 운영 안정화를 인한 공사기간 변경

○ 준공기한 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2017. 12. 11. ~ 2018. 09. 30.	2017. 12. 11. ~ 2018. 10. 31.	증) 31일

○ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 감리 검토의견

- 전용차로 개통 후 발생할 수 있는 문제점 및 기능 보완 등 안정화를 위한 준공기한 연장함이 타당할 것으로 사료됨.

4		조치계획

○ 상기와 같이 준공기한 연장하여 전용차로 개통 후 도로 운영 안정화에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.